투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경(정산) 시행(우이교 내진성능 보강공사)

1. 시설보수과–3249(2018.4.26.)호 설계변경(정산)보고 방침과 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 시행중인 『우이교 내진성능 보강공사』가 완료되어 아래와 같이 설계변경(정산)을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 우이교 내진성능 보강공사

나. 공사기간 : 2017.9.1. ~ 2018.4.30.

다. 총공사비 : 1,025,042,540원

(도급비 930,010,400원. 관급비 95,032,140원)

라. 공사개요 : 아스팔트 절삭 후 포장 12.957a, 교량받침교체(550KN) 108개소,

신축이음설치 140m, 기타 부대공 1식

마. 계 약 자 : 경창산업개발(주) 대표 황재철

바. 변경사유 : 물량 증·감 및 정산

사. 변경내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감
총공사비	1,143,222,140	1,025,042,540	감)118,179,600
도 급 비	1,003,090,000	930,010,400	감)73,079,600
관 급 비	95,032,140	95,032,140	0
이 전 비	45,100,000	0	감)45,100,000

아. 예산과목 : 도시개발특별회계, 교량안전과, 교량관리, 일반교량관리, 교량시설물 내진보강공사, 시설비 및 부대비, 시설비.(이월공사)

붙임 : 설계변경 관련서류 1부.  끝.

주무관	홍정식		시설보수과장	이근봉		북부도로사업소장	04/26 신응수
협조자
시행	시설보수과-3252	(		)	접수		(		)
우	01137	서울 강북구 한천로 913	/	www.seoul.go.kr
전화	944-5451	/전송	945-5073	/		/	대시민공개