문서번호	도시철도토목부-5078
결재일자	2018.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
임경태		윤방식	04/26 代윤방식
협조

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(5차1회)』

건설사업관리용역 기간 연장 검토보고

2018. 04.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설사업관리용역(5차1회)』

건설사업관리용역 기간 연장 검토보고

「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차)」으로 시행중인 “고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계용역(보완)” 수행중 용역기간 연장이 필요함에 따라 이에 대한 검토 보고 임.

※관련문서 : 대한(철도) 제18-80(2018.04.25.)

1

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 공사개요 : 연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

❍ 용역금액 : 총괄) 2,046,114천원

5차)   22,000천원

❍ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 이우정 외 2

❍ 용역금액 : 총괄) 2015.03.13. ~ 2018.08.08.

5차) 2017.12.15. ~ 2018.04.29.

❍ 계약현황

(단위 : 천원)

구 분	총 괄	1~4차(준공)	5차(진행중)	6차(진행중)	비 고
용역기간	2015.03.13. ~ 2018.08.08.	2015.03.13. ~ 2017.12.22.	2017.12.15. ~ 2018.04.29.	2017.12.23. ~ 2018.08.08.
용역비	2,046,114	1,499,101	22,000	525,013

※ 5차 용역 : 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계 용역(보완)

2

추 진 현 황

❍	'15.03.13.	:	총괄 및 1차 용역 계약
❍	'15.03.13.~'17.12.22.	:	1~4차 용역 시행(완료)
❍	'17.12.15.~'18.04.29.	:	5차 용역 시행(진행)
❍	'17.12.23.~'18.08.08	:	6차 용역 시행(진행)

3

보 고 내 용

❍「고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계용역(보완)」과업내용

- 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) 용역

․규    모 : 고덕교 연장 40m, 폭 20→21.2m(확장)

고덕보도교 1교) 연장 56m, 폭 4m (신설)

고덕보도교 2교) 연장 58m, 폭 4m (신설)

- 용역기간 : 2017.12.15. ~ 2018.04.29.

- 용역금액 : 금22,000,000원(금이천이백만원)

※ 예산과목 : 도로건설, 광역도로건설(광역교통시설특별회계), 사가정길~암사동간도로개설(암사대교건설), 시설비및감리비, 시설비(401-01)

❍ 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계용역(보완) 추진현황

구 분		일 정	기 간
디자인 심 의	과업착수일	2017.12.15	2017.12.15 ∼ 2018.02.13 계 : 61일
	디자인심의 개최	2018.02.08
	디자인심의결과 통보	2018.02.13
특정제품 심 의	특정제품(공법)선정심사위원회 심의자료작성 및 완료 예정일	2018.02.14 ∼ 2018.05.20	계 : 101일
계			총계 : 162일

❍ 과업기간 연장

- 당  초 : 2017.12.15. ~ 2018.04.29.(136일)

- 변  경 : 2017.12.15. ~ 2018.08.08.(과업연장 101일)

- 사  유 : 당초 실시설계(보완) 발주시에는 서울시 디자인자문위원회 심의 및 특정제품(공법) 선정 심사위원회 심의가 포함되지 않은 기간으로 과업이 발주되었으나, 과업수행 중 디자인심의 및 특정제품(공법)심사위원회 심의를 받아야 함에 따라 이로 인한 과업기간 연장이 필요함.

4

조 치 계 획

❍ 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사의 실시설계(보완)를 원활히 수행하기 위해서 아래와 같이 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역(5차1회)을 연기코자 함.

❍ 계약금액 및 계약기간 변경

(단위 : 천원)

구 분		당 초	변 경	증 (감)	비고
총괄	계약금액	2,024,114	2,024,114	변경없음
	기 간	2015.03.13.~ 2018.08.08	2015.03.13.~ 2018.08.08	변경없음
5차 (1회)	계약금액	22,000	22,000	변경없음
	기 간	2017.12.15.~ 2018.04.29.	2017.12.15.~ 2018.08.08.	증 101일

붙임 : 1. 변경계약 요청서 1부.

2. 변경설계서(5차1회). 1부.

3. 합의각서(총괄5차1회) 각1부.  끝.