투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사)

우리 본부에서 시행중인 『종로BRT 및 도로공간 재편 전기공사』와 관련하여 아래와 같이 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 변경내용 -

구 분	계약금액(원)			공사기간	변경사유
	당초	변경	증·감
전기공사	823,416,000	536,429,000	-286,987,000	변경없음	물량변경, 보험료 정산

붙임 (1) 변경내역서 1부.

(2) 합의서 1부.

(3) 계약금액검증확인서 1부.

(4) 방침서 1부.  끝.

	설비부장
★주무관	진종구		녹색성장과장	오삼록		설비부장	04/26 代유병기
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-5609	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	3708-8636	/전송	3708-8659	/	jin0652@seoul.go.kr	/	대시민공개