위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	(주)재우 C&C 대표 윤용배 귀하
(경유)
제목	공사과업 추가 요청(한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수공사)

1. 귀 사와 우리시가 계약 체결하여 시행중인 『한양도성 남산구간 여장하부 성돌 보수 공사』와 관련하여 공사과업 추가 사항이 있어 다음과 같이 요청 하니 검토 후 적극협조하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러, 공사 과업 추가에 따른 계약 변경은 추후에 추진할 예정임을 알려드립니다.

가. 과업 추가 사항

1) 남산 캠프모스 낙석 방지 시설 공사

- 안전 휀스 설치(길이 50m, 높이 4m, 군부대 협의 후 시행)

2) 혜화동 풍화 성돌 구간(혜화동 23번지 일대) 임시 보강 공사

- 성돌 탈락 부위 보강(길이 150m, 약 90개소)

붙임 : 과업 추가 관련도면(별도 송부).  끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	구선이		도성보존팀장	신추교		한양도성도감과장	04/27 진용득
협조자
시행	한양도성도감-4086	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	대시민공개