문서번호	설비부-15702
결재일자	2017.9.13.
공개여부	비공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	열빛총괄과장	설비부장	시설국장		도시기반시설본부장
추한영	유병기	권오식	류훈		09/13 고인석
협 조	기획예산과장			안순봉
	경리과장			최정수
	주무관			김두환

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설』

설비분야 공사 시행 계획 보고

2017. 09

도시기반시설본부

설 비 부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설』

설비분야 공사 시행 계획 보고

강화된 공공하수처리시설 방류수 수질기준 준수 및 한강 수질오염총량제 대비를 위한『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업』기계・전기・통신분야 공사시행 계획을 보고 드림

Ⅰ		공사 개요

❍ 공 사 명  : 중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 기계설비공사

❍ 위    치  : 성동구 송정동 73번지 일원(중랑물재생센터 내)

❍ 공사규모  : 사업대상 828,000㎥/일

- 총인처리시설 412,000㎥(T-P 0.13mg/L이하) - 비총인처리시설 416,000㎥(T-P 0.8mg/L이하)	⇒	혼합방류 T-P0.46mg/L이하

❍ 주요설비  : 유입펌프설비, 총인처리설비, 용수공급설비, 슬러지 탈수설비  건축기계설비, 소방설비 등

❍ 공사기간  : 착공일로부터  26개월

❍ 총사업비  : 56,719백만원(기계 15,123백만원, 전기 7,865백만원)

Ⅱ		추진 경위

❍ 2013.05.28 : 물재생센터 총인처리시설 설치계획 수립(행정2부시장 방침)

❍ 2014.08.11 : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치계획 방침

❍ 2015.09.22 : 기본 및 실시설계용역 착수

❍ 2017.03.31 : 기본 및 실시설계용역 완료

❍ 2017.08.18 : 계약심사 완료

Ⅲ		공사발주 계획

현    황

❍ 공사기간 : 총차 26개월(1차 2018.4.30.)

❍ 공 사 비

(단위 : 백만원)

분 야	계	도 급 비	관 급 비	이전비	비 고
계	23,029	6,007	16,738	284
기 계	15,123	2,638 (추정가격 2,398)	12,248	237	소방 포함
전 기	7,565	3,153 (추정가격 2,866)	4,375	37	소방 포함
통 신	341	216 (추정가격 196)	115	10

※ 토목, 건축, 조경, 폐기물, 시운전은 방재시설부에서 시행

❍ 예산과목

- 조직)물순환국 물재생시설과, 정책)물재생시설 개선 및 관리, 단위)물재생시설개선, 세부)물재생센터 3차(총인)처리시설 설치, 편성목)시설비 및 부대비, 통계목)시설비

❍ 직접시공 업종

기 계 설 비 공 사				전 기 설 비 공 사		통신공사
기계설비	소방(기계)	가스	정화조	전기	소방(전기)
○	○	X	X	○	○	○

※ 소방시설공사 자격

- 기계분야 : 일반소방시설공사업(기계) 이상

- 전기분야 : 전문소방시설공사업 이상

입찰 및 계약

❍ 계약방법 : 총액 / 장기계속계약

❍ 입찰방법 : 제한입찰(실적제한)

❍ 입찰참가 자격 및 제한

분야	기계(소방포함)	전기(소방포함)	통 신	비고
자 격 (면허)	전문건설업(기계설비공사업) + 일반소방시설공사업(기계) 또는 전문소방시설공사업 ※ 공동도급(분담이행)으로 자격보완 가능	전기공사업 + 전문소방시설공사업 ※ 공동도급(분담이행)으로 자격보완 가능	정보통신공사업
입 찰 참 가 제 한	- 실적제한 ・최근 10년이내 하수처리장 및 분뇨․폐수처리장 시공실적이 1,678 백만원 이상(기계설비공사) ※입찰에 참가하려는 공동수급체는 구성원 중 일부 구성원이 입찰공고에 정한 실적 이상이면 입찰참가가 가능함 ※추정가격의 0.7배	시공능력평가액 제한 ・입찰참가신청 마감일 기준 시공능력평가액 5,263 백만원 이상(전기공사업) ※추정가격의 1.9배	지역제한 ・입찰참가신청 마감일 기준 주된 영업소가 서울특별시에 소재한 업체
공동도급	구성원 수 5개사 이내 【구성원 계약참여 비율은 5% 이상】 대표업체는 출자비율이 큰 업체		해당없음
지역의무 공동도급	서울시에 주된 영업소를 둔 자(이하 “지역업체”)가 49%이상 시공 참여하여야 함		해당없음

❍ 현 장 설 명 : 생략(지방계약법 시행령 제15조 제3항)

❍ 낙찰자 결정 : 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준에 의함

- 행정자치부 예규 시설공사 적격심사 기준에 의함

❍ 관급자재 수급 : 제품의 안정성 및 전문성이 요구되어 신뢰성이 있는 우수한 제품을 구매하기 위해 조달구매하고자 함

직접시공 및 적정임금 지급 안내

❍ 계약상대자 이행각서 제출

- 근    거 :『서울특별시 공사계약 특수조건』제20조의3 및 제24조10항

- 제출기한 : 계약체결일로부터 7일이내

- 이행각서

․적정임금(시중노임단가 이상) 서울특별시 지급의무 이행각서

․서울특별시 직접시공 각서

❍ 안내방법 : 입찰공고문 명시

‣ “서울특별시 공사계약 특수조건”제20조의3에 따라 계약상대자는 직접시공해야 하며, 계약 체결일로부터 7일 이내에 “서울특별시 직접시공 각서”를 도시기반시설본부 설비부 담당에게 제출해야 함

‣ “서울특별시 공사계약 특수조건”제24조10항에 따라 계약상대자는 근로자에 대한 “적정임금(시중노임단가 이상) 서울특별시 지급의무 이행각서”를 계약 체결일로부터 7일 이내에 도시기반시설본부 설비부 담당에게 제출해야 함

Ⅳ		향후 계획

❍ 2017.   9월 : 공사발주 및 계약의뢰(설비부 → 재무과)

- 2017년 예산 재배정시 공사시행 및 계약의뢰 예정

❍ 2017.  10월 : 공사계약 및 착공

❍ 2019.  12월 : 공사 완료

붙임 : 공사 설명서(기계,전기,통신) 각 1부. 끝.