문서번호	물재생시설과-18232
결재일자	2017.12.21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
이형선		황철호	12/21 代이웅희
협조

서남물재생센터 2처리장

원심농축기 분해 정비 집행계획 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
위ㆍ수탁 협약서 제8조	㈜서남환경	부품교체 필요성 및 집행계획 적정여부	적정 및 내역조정	48,125천원

2017. 12

물순환안전국

(물재생시설과)

서남물재생센터 2처리장

원심농축기 분해 정비 집행계획 검토 보고

㈜서남환경에서 검토 승인 요청한 2처리장 원심농축기 분해 정비 집행계획에 대한 검토 결과를 아래와 같이 보고합니다.

Ⅰ		요 청 내 용

□ 사업개요

□ 사 업 명 : 2처리장 원심농축기 분해 정비

□ 사 업 비 : 48,125천원

□ 사업내용 : 원심농축기 1호 정비

□ 계약방법 : 제한입찰(중소기업,실적)

□ 기    간 : 계약일로부터 40일

□ 시설현황

□ 원심농축기 현황

시설명	형식 및 규격	가동시간(H)	설치년도	제조사 (시공사)
원심농축기 1호	46㎥/hr×Ø650	12,451	2012	㈜로얄정공
원심농축기 2호	46㎥/hr×Ø650	12,234	2012	㈜로얄정공

□ 집행사유

장기간 운전으로 스크류콘베어의 타일이 파손되고 용사부가 마모되었으며, 소모성 부품인 베어링, 씰 등이 노후되어 소음과 진동이 발생되므로 슬러지의 안정적 처리에 지장을 초래

Ⅱ		집행계획 검토

□ 현장점검 결과

□ 점 검 일 : 2017. 12. 14.(목)

□ 점 검 자 : 이형선, 서남환경 김성운, 장석은

□ 점검결과

- 장기간 사용으로 스큐류콘베어 몸체의 타일이 파손되고 베어링 및 씰 등의 노후로 감속기의 소음과 진동이 심하여 노후 부품을 교체정비 함이 타당함

□ 사업의 타당성

□ 사업의 적정성 : 적정

- 원심농축기 부품교체로 슬러지의 안정적 처리에 기여

- 현황사진

원심농축기 전경	정비대상 원심농축기(볼 및 스크류 철거)
스큐류콘베어 타일파손	스크류 초경타일 파손품

□ 사업비 적정성 : 계약심사과 심사결과 반영

- 설계내역 검토결과

(단위 : 천원)

요청금액	조정금액	증감액	증감율	비 고
48,125	45,628	△2,497	5.2%	계약심사
․재료비 단가 및 재경비 조정

- 사업비 예산 현황

(단위 : 천원)

예 산 액	기요청액	금회요청액	잔 액	비 고
790,000	0	48,125	741,875	소규모수선비

□ 계약방법의 적정성

- 계약방법 : 제한입찰(중소기업자,실적)

- 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제20조

제1항제8호(중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제6조에 따라 중소기업청장이 지정·공고한 물품을 제조·구매하는 경우)

- 참가자격 : 원심농축기(세부분류번호:4710152504) 직접생산 확인증명서를 보유한 중소기업자

Ⅲ		조 치 의 견

□ 위 요청사업에 대하여 다음과 같은 조건으로 승인

□ 승인요청한 위 사업에 대하여 승인한 금액 이내로 발주

□ 중량물 낙하, 추락 등 안전사고 예방대책 수립 시행

□ 지침서에 제시된 조건에 따라 설치 후 시운전 결과 적정 이행여부

확인 후 준공처리

□ 중요 설비의 교체나 정비시 물재생센터 관리시스템에 입력 관리

붙임 심사결과내역서 1부.  끝.