문서번호	문화융합경제과-2622
결재일자	2018.3.13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	문화산업정책팀장	★문화융합경제과장
김성미	나형선	03/13 최판규

봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인(설계) 및 제작용역 준공기한 연기 검토 보고

2018. 3.

경제진흥본부

(문화융합경제과)

봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인 및 제작

용역 준공기한 연기 검토 보고

봉제역사관 전시물 제작․설치를 위해 추진 중인 용역과 관련하여, 건설공사 준공기한 연기를 사유로 콘테츠 설계 및 제작․설치 용역 준공기한을 연장하고자 함

Ⅰ		용 역 개 요

□ 계 약 명 : 봉제역사관 전시장 등 콘텐츠 디자인 및 제작 용역

□ 계약업체 : 베리준오 주식회사 (대표자 오준식)

□ 계약금액 : 222,459,600원

□ 계약기간 : 2018. 1. 25 ~ 2018. 3. 13(계약일자 2018.1.25)

□ 과업내용

○ 전시 및 공간 기획에 따른 전시물(전시매체 포함), 집기 등 디자인(설계)

○ 전시 콘텐츠 제작(사진, 영상)

○ 과업수행과 관련하여 발주처에서 요구하는 사항(콘텐츠 설치)

Ⅱ		용역 변경사항

□ 변경사항 : 준공기한 연기 (※ 계약금액 변동없음)

○ 연기기한 : 2018. 4. 10

계약기간변경	당 초	2018. 1. 25. ～ 2018. 3. 13.
	변경후	2018. 1. 25. ～ 2018. 4. 10.

□ 지체상금 부과여부 : 미부과 (연기사유 귀책 서울시 소재)

□ 연기사유

○ 건축물 준공기한이 연장되어(’18.1.13 → 2.12) 전시 콘텐츠물 설치작업이 지연됨에 따라 콘텐츠 제작․설치 용역 기간연장 필요

Ⅲ		행정 사항

○ ’18. 3. 13.	용역 준공기한 연기 의뢰

○ ’18. 3. 30.	콘텐츠 제작․설치관련 현장 보고

붙임 : 용역기한 연기요청 공문(베리준오 주식회사) 1부.  끝.