＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	남부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰(2017년 관악,금천구 시설물 공사 3차-최종)

1. 우리사업소에서 시행중인『2017년 관악,금천구 관내 상수도 시설물 설치     및 보수공사』에 대하여 아래와 같이 설계변경(제3회-최종)을 시행하고     계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명 : 2017년 관악,금천구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사

나. 계 약 자 : ****************

다. 계약기간 : 2017. 4. 20. ~ 2018. 4. 30.

라. 설계변경 사유 : 시공물량 증․감 및 신규공종 발생

마. 설계변경 내역(도급액 변경 있음)                          (단위:원)

구 분	당초 금액	변경 금액	증․감	비고
공급가액	598,041,546	653,090,910	증)55,049,364
부가가치세	59,804,154	65,309,090	증)5,504,936
도 급 액	657,845,700	718,400,000	증)60,554,300

바. 예산과목

- 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비.

- 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비, 수선유지비.

사. 최대이행금액 : 400,000천원(변동없음)

따로붙임 : 1. 설계변경 시행 1부.

2. 설계변경(조정) 보고서 및 내역서 1부.

3. 계약금액 조정 검토 결과서 1부.

4. 합의서 1부.

5. 계약금액 조검 검증 확인서 1부.  끝.

	급수운영과장
주무관	류태현		주무관	강동길		급수운영과장	04/27 이성환
협조자
시행	급수운영과-8508	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로10길 97	/
전화	3146-4576	/전송	3146-4589	/	taehyeon@seoul.go.kr	/	부분공개(7)