위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	용역 변경계약 의뢰

1. 물재생계획과-1292호(2018.1.26.)와 관련입니다.

2. 우리과에서 수행중인 「사당역 일대 배수개선 단기대책(관로부분) 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 용역 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 용역 변경계약 내용

용 역 명		사당역 일대 배수개선 단기대책(관로부분) 기본 및 실시설계 용역
용 역 비	당 초	658,676,000원
	변 경	694,266,000원
용 역 기 간	당 초	2016. 7. 13. ~ 2018. 4. 27.
	변 경	2016. 7. 13. ~ 2018. 9. 28.

***********

**************************************************************

붙임 : 1. 방침서(설계변경 계획보고) 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 변경설계서 1부.

4. 합의각서 1부. 끝.

	물재생계획과장
★주무관	곽인복		배수설계팀장	심형보		계약1팀장	조현		물재생계획과장	04/27 하상문
협조자
시행	물재생계획과-5594	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 별관 1동 8층	/
전화	02-2133-3857	/전송		/		/	부분공개(7)