문서번호	방재시설부-5574
결재일자	2018.4.30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	04/30 이임섭
협 조

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사- 예비준공검사 시행계획

2018. 4.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사- 예비준공검사 시행계획

『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』에 대한 예비준공검사를 실시하여 준공전 미흡사항 사전 보완과 시설 인계․인수에 차질이 없도록 조치하고자 함.

공사현황

○ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

○ 공사개요

- 위  치 : 서초구 우면동 446-5일대(강남순환도로 선암교 하부)

- 규  모 : 부지조성 6,459㎥, 제설전진기지 및 직원대기실 등

○ 총공사비 : 24억 (도급비 2,136백만원)

○ 공사기간 : 2017. 09. 13. ~ 2018. 05. 31.

○ 감독기관, 감리사(분야별)

- 서울시설공단(토목), 하스종합건축사사무소(건축)

○ 시 공 사 : 우륭건설(주)외 1

예비준공검사 개요

○ 일    시 : 2018. 05. 08.(화) 14시 ~

○ 장    소 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 현장

○ 점 검 자

- 사업주관부서 : 도로관리과 담당자

- 도시기반시설본부 : 분야별 공사관리관(토목, 건축, 기계, 전기)

- 유지관리기관(남부도로사업소) : 업무 담당자(청사관리, 제설)

- 외부전문가 : 더원ST개발 대표 양동종

○ 입 회 자

- 위탁감독자(서울시설공단), 건축․전기 등 분야별 감리자

- 분야별 시공사 현장관계자

○ 주요 점검내용
- 공사 완료한 시설물 상태 : 이상유무 확인
- 시설물 품질 확보 및 하자 발생 여부
- 인계·인수 관련 사전 보완 필요사항

행정사항

○ 외부전문가 자문비 지급 : 150,000원(150,000×1인/2시간초과)

- 예산과목 : 안전총괄본부 도로관리과, 도로관리(6개도로사업소),

사무소 환경개선(도시개발), 도로사업소 청사신축,

시설비 및 부대비, 시설부대비

향후계획

○ ‘18. 05.     : 지적사항 등 보완완료
○ ’18. 05. 31.: 공사 준공 보고(도기본 → 市 도로관리과)

붙 임 : 1. 감독기관(공단) 및 시공사 관련문서 1부.

2. 점검표 및 점검자 서명부 각 1부.  끝.