문서번호	기술국-8332
결재일자	2017.9.27.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

				시 민
기술관리팀장	기술관리부장	기술국장		교통방송 대표
김응석	손재달	변동운		09/27 정찬형
협 조
	기획조정실장		남길순
	경영지원부장		이준연
	재무팀장		代김혜자

『tbs 교통방송 방송프라자 구축』

계약 변경 계획

2017. 9.

교통방송 기술국

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
성별분리통계	● 성별분리통계 작성여부를 검토하였습니까? 예) 인적통계 남·여 구분, 수혜집단의 남·여 구분 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까? 예) 스페이스, 플랜, 앵커시설, 거버넌스, 인큐베이팅, 매칭 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□
지속 가능성	● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등	□	■

『tbs 교통방송 방송프라자 구축』

계약 변경 계획

우리 교통방송에서 “tbs 교통방송 방송프라자 구축” 사업 진행 중 일부장비의 설치불가 사유발생 및 서울산업진흥원 제공 장비의 납품지연으로 인해 당초 계약 기간 및 내역의 변경이 불가피 하여 변경계약 하고자 함.

1

추 진 근 거

지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준

(행정안전부 예규 제1호, 2017. 7. 26.)

계약체결통보(tbs 교통방송 방송프라자 구축)

(재무과-28967, 2017. 6. 9.)

2

계 약 현 황

tbs 교통방송 방송프라자 구축 계약 현황

계약건명	tbs 교통방송 방송프라자 구축
계약업체	주식회사 진우엠앤씨
계약기간	2017.05.15. ~ 2017.10.13
계약금액	금469,000,000원
발 주 처	교통방송 기술국

3

설 계 변 경

설계변경사유

○ 당초 계약시 세부 납품 설치내역 중 LED전광판 변경                         - LED전광판 설치 허가 불가 : 마포구청

- 사 유 : 디지털 광고물을 설치할 수 있는 대상에 해당 않됨

- 관련근거 : 서울특별시 옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한                  조례 [시행 2017.7.13.] [서울특별시조례 제6546호]  제2조 3항

▶ 자사광고(자기가 사용하고 있는 건물·시설물·점포·영업소 등에 자기의             광고 내용을 표시하는 광고물을 말한다. 이하 같다)에 광원이 직접               노출되거나  빛의 점멸·화면변환 또는 동영상의 변화가 있는 네온류

·전광류 광고물이나  디지털 광고물을 설치할 수 있는 대상 명시

**************************

****************************************          **************************

- ******************************************

**	*******	**	**
*	***********	**	*
*	**************	**	*
*	**************	*	*
*	****************	*	**
*	****************	*	**
*	*****************	*	*
*	*******	*	**
*	************	*	**
*	***********	**	*
**	*********	**	*
**	*****************	*	*
**	***********	**	*
**	********	**	*
**	******	*	*
**	*************	**	*

********************

○ 우리 교통방송 안정성을 증가시키고 청사 내에서 방송프라자 방송제작            현황을 실시간으로 모니터링 할수 있도록 방송시스템 구성 일부 장비 변경

변경내용

○ 계약기간 변경

계약건명	tbs 교통방송 방송프라자 구축
계약업체	주식회사 진우엠앤씨
****	********	**************************
	********	**************************
계약금액	금469,000,000원(변경없음)

○ 세부 납품내역 중 일부 내역 변경

*****************

*******************************************

· 첨부 변경 산출내역서 참조

○ 계약금액 변경없음

4

향후 추진계획

tbs 교통방송 방송프라자 구축 사업의 계약금액변경 없이     계약기간 연장 및 일부 납품장비 변경내역으로 변경계약 하     고자 함.

* 첨부: 1. tbs 교통방송 방송프라자 구축 변경 산출내역서 1부.

2. 합의각서 1부.

끝.