투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연기 의뢰(길동생태공원 반딧불이 서식처 조성사업 실시설계용역)

1. 조경지원과-789(2018.03.27.)호의 관련입니다.

2. 우리 사업소에서 추진 중인 「길동생태공원 반딧불이 서식처 조성사업 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰합니다.

가. 용 역 명 : 길동생태공원 반딧불이 서식처 조성사업 실시설계용역

나. 용역기간 : 2018. 04. 04. ~ 05. 03.

다. 도 급 액 : 금6,670,000원(금육백육십칠만원)

라. 도 급 자 : *******************

마. 준공기한 연기

1) 당초 : 2018. 04. 04. ~ 05. 03.

2) 변경 : 2018. 04. 04. ~ 06. 12.(40일 연장)

바. 연기사유 : 물순환 생태계류 복원 사업 주관부서인 자연생태과 설계 심의 및 전문가 자문 등에 용역기간 추가 소요로 준공기한 연기가 불가피 함.

사. 지체상금 부과검토

1) 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

2) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임 : 준공기한연기 검토보고서 1부.  끝.

	조경지원과장
주무관	신보식		조경소재팀장	代박선재		경리팀장	곽선아		조경지원과장	04/30 김제중
협조자
시행	조경지원과-1267	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/	http://parks.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개