위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	서울교통공사사장
(경유)
제목	세출예산 추진현황 보고시 지시사항 통보(지하철 1~4호선 노후시설 재투자)

1. 도시철도 노후시설 개선을 위해 ‘11년부터 추진 중인 “지하철 1~4호선 노후시설 재투자”사업과 관련입니다.

2. 위 사업에 대한 매월 실시하는 세출예산 추진현황 보고시 나온 지시사항에 대하여 아래와 같이 통보하오니 조치결과를 ‘18. 5. 11.(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

- 지 시 사 항 -

가. 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 사업의 국비 집행률 제고를 위한 체계적이고 계획적인 공정관리 필요

1) 분야별 세부사업 중 지연되고 있는 14건(변전 1건, 송배전 7건, 전기실 6건) 사업에 대한 공정만회 대책을 마련하고, 만회대책 및 수정공정계획표 제출(지연사업은 정상추진이 될 때까지 지속 점검예정)

2) 서울교통공사에서 ‘18년 세출예산(사업비 32%)을 적게 편성하여 사업이 지연(각 사업별 세출예산 맞게 공정관리 시행)될 수밖에 없는 실정임으로 총 사업비의 50%(640억 원)이상을 세출예산(추경반영 등)에 편성하고, 사업별 예산(변경)편성 계획 제출

- ‘18년 집행목표 : 640억 원 이상 지출(국비 재 이월불가와 ’19년도의 사업추진을 위해 최소 50% 이상의 예산지출 필요)

3) 9개 시설 49개 세부사업에 대한 ‘18년 예산집행계획(위 변경예산에 맞게)을 수립하고 예산집행계획(분기별)서 작성 제출

4) ‘18년 사업은 가능한 당해 회계연도에 사업을 마무리하도록 하고, 불가피한 사유가 있는 경우 서울시(교통정책과)의 승인을 득한 후 이월추진

5) 市에서는 본부장님 주재 하에 매월 공정보고회를 개최하여 사업추진 현황을 점검할 계획이니 사업담당자는 사업관리와 집행률 제고에 만전을 기하여 주시기 바람.

나. 지하철 1~4호선 노후시설 재투자 사업에 대한 ‘11. ~’17.기간의 예산집행 현황 제출(붙임참조).

따로붙임 : 작성양식 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이성열		도시철도안전팀장	김재창		교통정책과장	05/02 구종원
협조자
시행	교통정책과-10312	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문별관 1동 7층 (서소문동)	/
전화	02-2133-4162	/전송	02-2133-1048	/	san730@seoul.go.kr	/	대시민공개