문서번호	소방행정과-4442
결재일자	2018.5.2.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
담당자	장비회계팀장	소방행정과장	소방서장
김종돈	최강의	김종린	05/02 김병로
협 조

-현상설계경기 공모 당선작에 대한- 설계용역 발주 계획(수의계약)

2018. 05.

강서소방서

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호		□	의사결정 또는 내부검토 과정

-현상설계경기 공모 당선작에 대한- 설계용역 발주 계획(수의계약)

강서소방서 마곡119안전센터 신축공사 현상설계경기 공모 당선자에 대해 기본·실시설계 용역계약을 추진하고자 합니다.

Ⅰ		추진근거

□ 市 기술심사담당관-18711(2017.11.1.)“제1593차 기술용역       타당성심사 결과통보”

□ 소방행정과-4117(2018.4.23.)“마곡119안전센터 현상설계경기       공모작품 심사결과 보고”

Ⅱ		설계용역발주계획

□ 사 업 명 : 강서소방서 마곡119안전센터 신축공사

□ 위    치 : 서울 강서구 마곡동 마곡지구(공공용지 F11)

□ 사업기간 : 2018. 01 ~ 2019. 10.

□ 규    모 : 3층 연면적 845㎡, 대지면적 1,063㎡

□ 지역지구 : 제1종일반주거지역, 도시지역, 지구단위계획구역

□ 사 업 비 : 금5,509,733천원                  (단위:천원)

부지매입비	공사비	감리비	설계비	사무관리비	자산취득비	시설부대비
3,445,183	1,835,000	21,102	94,077	40,000	50,000	7,523

□ 설계용역 계획

○ 건    명 : 강서소방서 마곡119안전센터 설계용역

○ 기    간 : 2018. 5. 14. ~ 8. 22.(100일)

○ 범    위 : 기본 및 실시설계(건축,토목,기계,조경,전기,통신,소방)

○ 설 계 비 : 금85,525천원(금팔천오백오십이만오천원)

※ 서울시 기술심사담당관 설계용역비 타성성 심사 조정함

○ 업 체 명 : ㈜ 건축사사무소 빅, 대표 진태호

(공동응모:오피스경 건축사사무소, 대표 권경은)

※ 소재지 : 서울시 성북구 성북로 108-0

○ 계약방법 : 전자수의계약(수의시담)

※ 관련근거

1. 지방계약법 제13조 제2항3호 및 시행령 제42조의4(설계공모에 의한         낙찰자 결정)

2. 지방계약법 시행령 제25조제1항4호자목(디자인공모에 당선된자와 설계

용역 계약을 체결하는 경우)

○ 수의계약 사유 : 현상설계경기 공모 당선자와 계약 체결

○ 수의시담 일정

공고기간	입찰일시	개찰일시	입찰방법	개찰장소
’18. 5. 2 ~ 4.	’18. 5. 8. 09:00 ~ 13:00	’18. 5. 8. 14:00	전자입찰 (수의시담)	강서소방서 입찰집행PC관

○ 예산과목 : 소방안전특별회계/마곡119안전센터신설/시설비(401-01)

Ⅲ		추진일정

□ 설계용역 계약체결 : 2018. 5. 10.

□ 설계용역 기간 : 2018. 5. 14. ~ 8. 22.(100일간)

□ 서울시 경관심의 : 2018. 5. 28. ~ 6. 18.(20일간)

□ 서울시 계약심사 : 2018. 8. 18. ~ 8. 28.(10일간)

□ 용역 완수검사 : 2018. 8. 22. ~ 8. 31.(14일간)

□ 용역 대가지급 : 2018. 8. 31. ~ 9. 5.(5일간)

Ⅳ		기대효과

□ 소방수요에 적합한 소방력 확충 및 운용으로 재난현장 대응능력 강화

□ 소방안전 인프라 확충을 통한 안전사각지대 해소 및 시민행복 맞춤형

안전복지 서비스 강화

□ 대시민 안전사각지대 해소 및 황금시간 목포제 실행을 통한 시민의 생명과       재산을 보호

붙임 1. 지명초청 설계경기 현상공모계획(방침) 1부.

2. 기술용역 타당성 심사결과 1부.

3. 현상설계경기 공모 수상작 선정공고 1부.

4. 전자수의시담 공고문 1부.

5. 수의계약사유서 1부.

6. 수의시담업체 사업자등록증 1부.   끝.