위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	문화재청장(보존정책과장)
(경유)
제목	2018년 국고보조사업(서울 한양도성 보호각 설치) 지침변경 요청

한양도성 해빙기 대비 전문가 합동 점검을 실시한 결과, 붕괴 등 안전사고가 우려되는 위험구간 성벽에 대하여 안전시설 설치 및 정밀 안전진단 용역을 추진하고자 아래와 같이 국고보조사업의 지침변경을 요청하오니 검토 · 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 문화재명 : 사적 제10호 서울 한양도성

나. 사업내용 :「보호각 설치」

다. 예 산 액 : 금4,000백만원(국비 2,800, 지방비 1,200)

라. 요청사유 : 2018년 문화재보수정비(총액계상) 국고보조사업으로 추진중인 한양도성 “보호각 설치” 사업은 공사기간이 장기간(2018년~2019년) 이므로 붕괴 등 안전사고가 우려되는 위험구간 성벽에 대한 안전시설 설치 및 정밀 안전진단 용역을 우선 추진하고자 지침변경 요청

마. 지침변경 요청내용

당 초 지 침	변 경 지 침	비 고
○ 관계전문가의 자문을 받아 남산 회현자락 발굴유적을 보존·정비하고, 유적보호시설을 설치하며, 관련 탐방로를 조성한다. ○ 인왕산 탐방로 주변 경관저해시설****** 및 성벽을 정비한다.	○ 붕괴위험구간 성벽에 보호시설을 설치하고, 정밀 안전진단을 실시한다.(추가)	사업내용 추가

붙 임  1. 2018 해빙기 점검결과 1부

2. 한양도성 해빙기 전문가자문에 따른 조치계획 1부

3. 남산 캠프모스 현황사진 1부

4. 공사비 개략산출서 1부

5. 전문가 자문의견서 각 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
★주무관	구선이		도성보존팀장	代박근우		한양도성도감과장	05/03 진용득
협조자	도성관리팀장	곽동진
시행	한양도성도감-4236	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동) 서소문청사 5층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-2672	/전송	2133-1063	/	ungum9@seoul.go.kr	/	부분공개(6)