문서번호	토목부-7682
결재일자	2018.5.3.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
노순재		代권순환	05/03 김영수
협조

공사장 교통소통 대책 변경 및 설계용역 실정보고

(동부간선도로 확장공사-1공구)

2018. 5.

도시기반시설본부

(토 목 부)

공사장 교통소통 대책 변경 및 설계용역 실정보고

- 동부간선도로 확장 공사(2공구) -

경원선 철도이설 공사로 본 공사가 중지 후 재착공 되었고, 최초 착공시 공사중 교통소통 대책을 재심의토록 되어 있어, 금회 심의를 완료하고 용역비를 반영코자 보고 드림

※ 관련근거 : 도화(동부간선)2018-29호(‘18. 04. 18.)

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 동부간선도로 확장공사(1공구)

○ 공사규모 : 도로확장 4→6차로, 연장 1,400m

○ 도 급 비 : 23,500,906천원(6차: 4,900백만원)

○ 공사기간 : ′08.12.~ ′19.12.

○ 시 공 사 : ㈜ 풍산건설외1

○ 감 리 사 : ㈜ 도화엔지니어링

Ⅱ		실정보고 내용

○ 추진경위

- ‘07.10. : 동부간선도로확장공사(1공구) 착공

- ‘08.09.: 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과알림(제16차)

(관련공문 : 서울특별시 교통운영담당관-12056(2008.09.18)

※ 자문회의 결과 : 조건부시행

◦ 공사기간이 너무 길어서 단계별로 상세계획을 수립하여 3단계부터는 향후에

재심의 받도록 할 것

- ‘12.01.: 동부간선도로확장공사(1공구) 공사일시중지

- ‘17.09.: 동부간선도로확장공사(1공구) 재착수

- ‘18.04.05: 도로점용공사장 교통소통대책 자문회의 결과알림(제5차)

- ‘18.04.25 : 심의결과 반영 및 교통운영과 협의 후 최종보고서 제출

○ 위치도

경원선철도이설 구간(금회)

의정부방향 종점구간(향후)

방음벽설치 구간(금회)

시공완료구간(전회)

○ 심의결과에 따른 교통소통대책 변경

- 마들로 : 우회도로 신설(경원선 이설부지 활용)

우회도로 평면도 및 횡단면도

- 학여울 청구아파트 방음벽 공사 : 단계별 교통 통제

Ⅲ		감리단 검토내용

○ 경원선 이설공사 후 공사 재착공에 따른 공사중 교통소통대책 변경에

따라 용역비 반영 및 교통안전 시설물 변경이 필요한 실정임

○ 용역비 검토

구 분	금 액				비 고
	교통소통대책 대행 설계가	견 적
		㈜세종 이엔씨	㈜대건 이엔씨	㈜진흥 이엔씨
제외율적용제외공종
공사중 교통소통대책수립비	124,021
◦마들길구간(A=9,380㎡)	75,331				일반도로
◦동부간선도로구간(A=2,210㎡)	48,690				고속화 도로
공급가액	124,021
부가가치세	12,402
합계	136,423
견적금액		115,500	121,100	132,000	84.663%
강제협의율 적용시 금액 (83.982%)		114,565			적용
엔지니어링사업대가 공사비요율 방식 (83.982%)		376,626

※ 교통품셈 <보정계수(ϒ) 최초심의/자문(1.0) +변경심의/자문(0.7)적용금액>

○ 공사비 증·감 대비표                                (단위 : 천원)

공 종	규 격	수량	단위	금액(천원)			비 고
				당초	변경	증.감
제용율적용제외공종
1.공사중 교통대책 수립비				154,550	222,750	68,200
1-1.공사중 교통대책 수립비(1차)	월계1교 구간	1	식	154.550	108,185	▽46,365	(당초 잔여도급금액)
1-2.공사중교통대책 수립비(2차)	초안산지하차도 및 방음벽구간	1	식	-	114,565	114,565
도급비계				154,550	222,750	68,200	(부가세 포함)

Ⅳ		조치계획

○ 공사 재착공에 따른 교통소통대책 변경 및 설계 용역비 변경 사항 반영

관련 감리단 실정보고 사항이 적정하여 승인 조치하고 설계변경 심의 후

내역에 반영코자 함.

붙  임 : 1. 감리단 검토 의견서

2. 용역비 산출근거 1부. 끝