투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(신호등이설 실정보고 승인통보)

1.업무지시현장 : 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사 쌍용건설(주), 별내선(8호선연장)

1공구 건설공사 주식회사 동해종합기술공사

2.작 성 일 자 : 2018-05-04 16:05:06

3.지 시 내 용

가. 별내 감1-18-125호(2018.4.16.)와 관련입니다

나. 위호와 관련하여 실정 보고한 「별내선(8호선연장) 1공구 건설공사」의 저촉되는신호등 이설계획에 대하여 책임건설사업관리기술자의 의견과 같이 승인 통보 하오니 사업시행에 만전을 기하여 주시기 바랍니다

- 이설대상

구 분		단위	당초	변경			증 감				비 고
				신설	이설	철거		신설	이설	철거
올림픽로	차량신호등	개소	0	10	22	6		10	22	6
	신호등(지주)		0	8	24	24		8	24	24
아리수로	차량신호등	개소	0	3	71	2		3	71	2
	신호등(지주)		0	7	74	11		7	74	11
계	차량신호등	개소	0	13	93	8		13	93	8
	신호등(지주)		0	15	98	35		15	98	35

- 이설 소요비용 : ***********

- 승인내용

1) 별내선(8호선연장) 1공구 건설공사와 저촉되는 신호등 시설에 대하여 관리기관과의 협의 결과를 반영하고

2) 소요 이설비에 대하여는 건설사업관리단의 의견과 같이 공사 추진 일정을 고려하여 시공사가 즉시 이설토록 조치하고 이설 완료후 설계변경자문위원회를 거쳐 반영 조치.끝.

본 기안은 One-PMIS내 행정정보연계를 통하여 수행하는 문서로, 결재 완료 시 One-PMIS를 통하여 대상현장에 발송처리 됩니다.

주무관							신익현			신교통1과장					위성환					도시철도사업부장					05/08 박동룡
협조자				주무관						왕태현
시행			도시철도사업부-4350									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지) 프리미어 플레이스빌딩(9층)															/			WWW.seoul.go.kr
전화		02-772-7189						/전송			02-772-7305					/	caram00@seoul.go.kr												/	대시민공개