투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2018년 제4차 설계변경 자문회의(소위원회) 개최

1. 2018년 제4차 설계변경자문회의(소위원회) 개최와 관련입니다.

2. 설계변경 자문회의를 아래와 같이 위원을 선정하여 개최하오니 발주부서 담당자는 자문자료에 단가결정, 설계자 검토의견, 실정보고서, 발주처의 방침서 등 근거자료를 포함한 자문자료를 작성(쪽번호 명시)하여 자문위원에게 사전 배포하여 주시기 바라며,

3. 자문위원께서는 협의단가 적용의 타당성, 공법변경의 적정성, 설계변경절차 이행의 타당성을 면밀히 사전검토하여 내실있는 자문이 이루어 질 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 설계변경 자문회의 개최 계획

제 목	제4차 설계변경자문회의(소위원회)
일 시	2018. 5. 15.(화) 14:00~
장 소	도시기반시설본부 토목부 회의실(청계천청사 12층)
자문위원	위원장 : 토목부 명 경 출 간 사 : 토목부 남 덕 희 위 원 : 토목부 박 형 재, 박 웅 교 감리단장 ******************************* 감리단장 ************************************ 감리단장 ************************************
자문안건 (15건)	1. 서초역~방배로간 도로개설공사 --------------------------------- 방재시설부 ○ 시점부 발파암 굴착소음으로 인한 민원저감 방안 ⇒ 증 137,500 천원 ○ 지하철 환기구(2-#183) 이설공사 변경 ⇒ 감 126,388 천원 2. 밤고개로 확장공사 ----------------------------------------------- 토 목 부 ○ 사토장 변경 선정 검토보고 ⇒ 감 2,598,490 천원 ○ 수서역 냉각탑 및 환기구저촉 검토보고 ⇒ 증 224,096 천원 3. 성산대교 남단 성능개선공사 ----------------------------------- 토 목 부 ○ 지반조사 시행 실정보고 ⇒ 증 256,190 천원 4. 성산대교 북단 성능개선공사 ----------------------------------- 토 목 부 ○ 가설교량 계측방법 및 가시설 계측수량변경 실정보고 ⇒ 증 363,000 천원 5. 월드컵대교 건설공사 --------------------------------------------- 토 목 부 ○ 난지한강공원(MP5구간) 원상복구 계획 검토보고 ⇒ 증 338,140 천원 ○ 북단접속교(MP5) 가축도 제거 사토 검토보고 ⇒ 증 127,126 천원 ○ 특수레미콘 사급화 검토보고 ⇒ 증 287,751 천원 ○ 측경간(MP12) 가시설 변경 검토보고 ⇒ 증 1,316,515 천원 ○ 강교(주경간교) 비파괴검사 수량 변경 검토보고 ⇒ 증 1,538,671 천원 ○ 강교(북단접속교) 비파괴검사 수량 변경 검토보고 ⇒ 증 162,403 천원 6. 강남순환도시고속도로(8공구) 건설공사 ------------------------- 토 목 부 ○ 매헌지하차도 부력방지앵커 실측 지하수위 반영 ⇒ 감 131,000 천원 ○ 지하차도 방수공사 바닥면 고르기 변경 ⇒ 감 90,000 천원 ○ 양재대로 교통소통대책회의 결과 반영 ⇒ 증 254,000 천원

붙임 : 자문요청서 1부.  끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
수신자	방재시설부장,남부순환로(개봉1동 사거리주변) 평탄화공사 책임건설사업관리기술자,신림~봉천터널 도로건설공사 1공구 책임건설사업관리기술자,장지지하차도~동부간선도로간 연결공사 책임건설사업관리기술자
주무관	임준우		도시고속도로과장	명경출		토목부장	05/08 김영수
협조자	주무관	남덕희
시행	토목부-7844	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동) 프리미어플레이스 빌딩 12층 토목부	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-8667	/전송	02-3708-2599	/	junu0301@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)