문서번호	도로보수과-4188
결재일자	2018.5.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
정회곤		김권일	05/08 김용제
협 조
	관리단속과장			代김태식

2018년 노후포장도로 정비공사

(강서1구역) 포장단면 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

강서도로사업소

도로보수과

2018년 노후포장도로정비공사

(강서1구역) 포장단면 검토 보고

2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역) 구간에 대한 코아

채취 결과를 반영, 포장단면을 결정하여  내구성 및 평탄성을 향상

시켜 시민들에게 편안한 도로환경을 제공하고자 함.

		관련근거

◦ 도로보수과-1379(2018.2.12.) 『2018년 노후포장도로 정비공사』 예산집행 및 공사

추진계획 보고

- 포장단면 결정 : 2018년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에서 코어채취 후

노후포장도로 정비공사 포장두께 결정

		현 황

◦ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서1구역)

◦ 사 업 비 : 2,940백만원

(도급비 629백만원, 관급비 1,638백만원, 이설비 및 기타 673백만원)

◦ 계 약 자 : ㈜베스트로드 대표 라윤주

◦ 공사기간 : 2018. 3. 30 ~ 2018. 12. 14

◦ 계약금액 : 628,994,200원

◦ 공사개요 : 일반아스팔트 포장 t=5cm~10cm, A = 985a

◦ 공사구간 : 곰달래로(목동사거리 ~ 화곡사거리)외 4개노선

		코아채취

◦ 목   적 : 2018년 노후포장도로 정비공사 대상구간에 대한 면밀한 단면 분석으로 아스팔트 포장구간의 내구성 증대 및 시공품질 향상

◦ 조사방법 : 도로포장관리시스템의 SPI 지수 확인 및 코아천공, 현장 육안조사

◦ 코아채취 결과

연번	노선명	위 치	차로 (편도)	설계 면적 (a)	코아 채취 (개)	설계 두께 (cm)	포장 두께 (cm)	균열 깊이 (cm)	포장단면
1	곰달래로	목동사거리 ↔ 화곡사거리	1	78	4	5㎝	15~25	5~7	표층5㎝ (WC-3 일반1등급)
2	공항대로	등촌삼거리 → 강서구청입구 교차로	3	156	6	10㎝	15~20	5~11	표층5㎝ (WC-3, 개질1등급) 중간층5cm (BC-1, 일반3등급)
3	등촌로	등촌지하차도 ↔ 등촌삼거리	3	657	20	10㎝	11~20	5~11	표층5㎝ (WC-3, 일반1등급) 중간층5cm (BC-1, 일반3등급)
4	39번 국도	대장2교 ↔ 인천시 계양구 경계	2	64	4	10㎝	16~27	6~7	표층5㎝ (WC-3, 일반1등급) 중간층5cm (BC-1, 일반3등급)
5	남부순환로	경인고속도로출구 → 남부순환로 합류지점	2	30	2	5cm	20	4~7	표층5㎝ (WC-3 일반1등급)
		계		985

		조치계획

◦ (연번 1, 곰달래로) 코아채취 결과 균열깊이는 5 ~ 7㎝이고, 편도 1차로로써 육안조사 결과 소성변형이 심하지 않으므로 설계두께 (5㎝)로 포장

◦ (연번 2, 공항대로) 코아채취 결과 균열깊이는 5 ~ 11㎝이고, 교통량이 많은 간선도로로써 부분적으로 소성변형이 심하므로 표층두께 (WC-3, 개질1등급) 5cm, 중간층(BC-1, 일반3등급)두께 5cm로 포장(상수도 공사구간 및 굴착 차로복구구간 제외)

◦ (연번 3,  등촌로) 코아채취 결과 균열깊이는 5 ~ 11㎝이고, 부분적으로 소성변형이 심하므로 표층두께 (WC-3, 일반1등급) 5cm, 중간층(BC-1, 일반3등급)두께 5cm로 포장

◦ (연번 4, 39번 국도) 코아채취 결과 균열깊이는 6 ~ 7㎝이고, 중차량 통행이 많아 부분적으로 소성변경이 심하므로 표층두께 (WC-3, 일반1등급) 5cm, 중간층(BC-1, 일반3등급)두께 5cm로 포장

◦ (연번 5, 남부순환로) 코아채취 결과 균열깊이는 4 ~ 7㎝이고, 램프구간으로 소성변형이 심하지 않으므로 두께 (WC-3, 일반1등급) 5cm로 포장

◦ 중간층용(BC-1, 일반3등급, t=20mm, 중간층용, 가열)아스팔트 콘크리트는 1등급 아스콘 계약업체(대원아스콘)는 강서지역에 조달구매 등록이 되어있지 않아 근거리에 있는 서인아스콘사업협동조합에 조달구매 의뢰하고자 함

- 51,870원/톤 × 10,504톤 = 544,842,480원

붙임 : 코어 채취 결과 각 1 부(사진별첨). 끝.