문서번호	시설관리과-8104
결재일자	2018.5.4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장
김진성		05/04 박은선
협 조
	주무관			윤복철
	주무관			김생수
	주무관			정연준
	주무관			강희창

설계변경 심의 의견서

(서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관 외 3건 정비공사 교통소통대책 용역)

2018. 05. 04.

강남수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의 의견서

❍ 공 사 명: ***************************************

신청부서명	시 설 관 리 과
작 성 자	주무관 *****
심의일시	2018. 5. 4.(금)

❍ 심의위원회 의견

- 심의일시 : ‘18. 5. 4.(금) 17:00~17:30

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과를 아래와 같이 의견 제시함

구 분	직위	심의결과	성 명	서 명
위원장	시설관리과장		*****
위 원	시설관리과 주무관	타당함	*****
위 원	급수운영과 주무관	적정함	*****
위 원	시설관리과 주무관	적정함	*****
위 원	시설관리과 주무관	적정함	*****

설계변경 요약 보고

용역현황

〇 공 사 명: *************************************

〇 공사개요: 당초 – D=300~700mm, L=3,970m

변경 – D=300~700mm, L=4,370m(증 400m)

〇 도 급 비: 당초 – 34,393,550원

변경 – 36,282,000원(증 1,888,450원)

〇 공사기간: 2018. 2. 19. ∼ 2018. 5. 9.

〇 시 공 사: ****************

〇 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관)정비-41101

설계변경 사유

〇 공사구간 연장 증가에 따른 용역비 정산

- 서초동 1339-9~1337-22호 간(강남대로)

· 1984년에 부설된 노후 비내식성관으로 적수 및 누수 발생에 따른 민원 해소를  위해 공사구간이 추가로 선정됨에 따라 공사구간 연장 증가

용역비 변경내역

(단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 용역비		34,393,550	36,282,000	증 1,888,450
도급비	공급가액	31,266,864	32,983,637	증 1,716,773
	부가가치세	3,126,686	3,298,363	증 171,677
	합 계	34,393,550	36,282,000	증 1,888,450

붙임: 설계변경 관련 서류 1부.  끝.