투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	준공기한 연장의뢰(서울숲 내진보강 실시설계용역)

1. 시설과-974(2018.05.03)호와 관련입니다.

2. 서울숲 내진보강 실시설계용역에 대하여 아래와 같이 준공기한 연장의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 용 역 명 : 서울숲 내진보강 실시설계용역

나. 계약기간 : 2018. 03. 12 ~ 2018. 05. 10

다. 계약금액 : 금육백이십만원(금6,200,000원)

라. 계약업체 : 예영건축사사무소 대표 이원기(*************)

마. 준공기한 연기

- 당  초 : 2018. 03. 12 ~ 2018. 05. 10

- 변  경 : 2018. 03. 12 ~ 2018. 06. 30

바. 지체상금 부과검토

- 연기사유 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

- 지체상금 부과여부 : 미부과

붙  임  1. 준공기한연기 검토보고서 1부.

2. 준공기한 연기의뢰서 1부.

3. 용역사 준공기한 연장요청서 1부. 끝.

	시설과장
★주무관	김영균		시설관리팀장	장창원		시설과장	05/04 진병규
협조자
시행	시설과-976	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	0221811162	/전송	02-2181-1169	/		/	대시민공개