＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	강남수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 시행에 따른 계약의뢰 (서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사외 3건 교통소통대책 용역)

우리과에서 시행하고 있는「서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사외 3건 교통소통대책 용역」에 대하여 설계 변경을 시행하고 아래와 같이 계약의뢰 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명: 서울고교사거리~뱅뱅사거리간 송배수관정비공사외 3건 교통소통대책 용역

나. 공사개요: 공사 연장(당초 3,970m, 변경 4,370m)

다. 설계변경 사유: 공사구간 연장 증가

라. 계 약 자: 주엔지니어링(주) 대표 이은경

마. 계약기간: 2018.2.19. ~ 5.9.

바. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설물 및 부대비, 시설비

노후 상수도관(송배수관)정비-41101

사. 변경금액

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총 용역비	34,393,550	36,282,000	1,888,450
공급가액	31,266,864	32,983,637	1,716,773
부 가 세	3,126,686	3,298,363	171,677
계	34,393,550	36,282,000	1,888,450

붙임: 1.설계변경 심의 의견서 1부

2. 설계변경 관련서류 1부.  끝.

	시설관리과장
주무관	김진성		시설관리과장	05/08 박은선
협조자
시행	시설관리과-8183	(		)	접수		(		)
우	03741	서울시 강남구 양재천로 199 강남수도사업소 시설관리과(4층)	/
전화	02-3146-4906	/전송	02-3146-4939	/	kjs3386@seoul.go.kr	/	부분공개(5)