투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	설계변경(총차 및 1차) 계약 및 준공기한 연장 의뢰 [탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사]

1. 설비부-6005(2018.05.04.)호와 관련입니다.

2. 우리 부서에서 시행중인 「탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사」에 대한 설계변경(총차 및 1차) 계약 및 준공기한 연장을 의뢰하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명:「탄천물재생센터 3차(총인) 처리시설 전기공사」

나. 도 급 비: (총차) 1,928백만원, (1차) 780백만원

다. 도 급 자: (주)부경일레콤 외 2개사

라. 설계변경 및 준공기한 연장 내용

구 분	계 약 금 액(원)			계 약 기 간		비고
	당 초	변 경	증․감	당 초	변 경
(총 차)	1,928,130,468	1,972,531,000	증)44,400,532	2017.11.30. ~ 2020.01.29.	2017.11.30. ~ 2020.03.31.
(1 차)	780,000,000	824,400,000	증)44,000,000	2017.11.30.~ 2018.08.31.	2017.11.30.~ 2019.02.14.

붙임  1. 검토 보고서 및 감리단 공문 1부.

2. 설계변경 내역서(총차 및 1차) 1부.

3. 합의각서(총차 및 1차)  1부.  끝.

	설비부장
주무관	김현욱		환경설비과장	여인웅		설비부장	05/08 권오식
협조자	경리과장	代김용범
시행	설비부-6089	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층	/	http://infra.seoul.go.kr/
전화	02-3708-8618	/전송	02-3708-8659	/	hyunkim@seoul.go.kr	/	부분공개(5)