문서번호	기전과-2588
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

	시 민
★주무관	기전과장
박태준	05/09 정판식

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「암사역 주변 하수암거 신설공사 2공구」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.   5.

동부도로사업소

(기 전 과)

교통안전표지 원인자부담공사 승인검토 보고

암사역 주변 하수암거 신설공사 2공구 교통안전표지 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대한 검토 보고

공사개요

○ 공 사 명 : 암사역 주변 하수암거 신설공사 2공구 교통안전표지 설치공사

○ 공사위치 : 강동구 고덕로(토끼굴 입구 교차로 ~ 선사사거리 주변)

○ 공사기간 : 승인일 ~ 2018. 05. 31.

○ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계	감 리	시 공
안전표지	강동구청 (치수과)	㈜동림티엔에스		㈜지아이엘건설

검토내용

○ 규제심의 : 서울지방경찰청 교통관리과-21002(2017.07.25.)

- 고덕로 유턴 허용(도로우회 주민 불편 해소), 횡단보도 이설, 신호기(차/보)        신설(공사점용에 따른 보행로 확보) 등

※ 유턴 및 횡단보도 이설은 단계별 공사완료 후 원상복구

○ 변경사항 : 토목공사 지연에 따른 준공일 연기 요청

구 분	원 인 자	당초 준공일	연기 요청일	비 고
안전표지	강동구청 (치수과)	~ 2018. 04. 27.	~ 2018. 05. 31.

○ 승인 조건

- 승인일로부터 준공승인 후 인수전까지 안전관리 및 사고에 대한 책임은 원인자에게 있음

- 교통사고 방지를 위하여 공사전 충분한 공사안내 홍보, 안내표지판 설치 등 준수

- 공사 작업구간에 통제수를 배치하여 교통 혼잡 방지 철저

- 야간공사 시 공사구간임을 인지 할 수 있도록 밝은 조도유지

- 해당 승인사항에 대한 공사완료시 준공승인을 제출하여야 하며, 변경사항         (교통안전시설 심의 등)이 있을시 별도 협의하여야 함

- 교통신호기공사 업무처리 지침 및 원인자 준수사항 이행 철저

- 교통안전시설 자료 관리시스템(T-GIS) 입력완료 후 준공승인 요청

검토의견

강동구청(치수과)에서 시행하는 암사역 주변 하수암거 신설공사 2공구 안전표지 설치공사 준공일 변경승인 요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임 : 1. 서울지방경찰청 규제심의 공문 사본 1부.

2. 설계내역서(물량표) 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 준공일 변경승인 요청 공문 사본 1부.  끝.