문서번호	방재시설부-5983
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	05/09 이임섭
협 조

『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』

실정보고(집수정 설치 외) 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』

실정보고(집수정 설치 외) 검토보고

남부도로사업소 제설전진기지 조성공사중 집수정 설치 외 공사 관련 실정보고건에 대한 검토보고임

<서울시설공단 공사감독1처-2677호(2018.05.08.)>

Ⅰ				사 업 개 요

○ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

○ 위    치 : 서초구 우면동 446-5일대(강남순환도로 선암교 하부)

○ 규    모 : 부지조성 6,459㎡, 제설전진기지 및 직원대기실 등

○ 공사기간 : 2017. 9. 13. ~ 2018. 5. 31.

○ 도 급 비 : 2,136백만원

○ 시 공 사 : 우륭건설㈜외 1개사

Ⅱ				추 진 현 황

○ 2016.12.08 : 장비보관소 부지변경 계획수립(부시장방침)

○ 2017.06.30 : 설계용역 완료

○ 2017.08.16 : 공사발주

○ 2017.09.13 : 공사착공

Ⅲ				보 고 내 용

○ 현장실정에 맞게 집수정 추가 설치 및 우, 오수관 연결 부속자재 누락 반영

○ 남부도로사업소 사용자측의 제설전진기지 건설 협조 요청사항 중 진입로 선형조정 및 주차라인 차선도색 요청을 반영

- 개략공사비

· 공사비 증감현황

공 종	단위	수량	공사비	비 고
집수정설치 외	식	1	7,230천원	증)
도급비 (제경비포함)			7,230천원	증)

○ 상기와 같이 현장 여건 및 사용자인 남부도로사업소 요구사항을 반영한 사항에 대한 감독기관(공단)의 실정보고 건에 대하여 “적정”하다고 판단되어 감독기관에 승인 통보하고 향후 설계변경시 정산하여 반영 조치하고자 함.

붙 임 : 1. 감독기관(공단) 관련문서 1부.

2. 감독기관(공단) 검토보고서 1부.

3. 개략공사비 산출내역서 1부. 끝.