문서번호	방재시설부-5982
결재일자	2018.5.9.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		방재시설과장	방재시설부장
이민영		진재섭	05/09 이임섭
협 조

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사- 예비준공검사 결과보고

2018. 5.

도시기반시설본부

(방재시설부)

- 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사- 예비준공검사 결과보고

준공시기(5.31.)가 도래한『남부도로사업소 제설전진기지 조성공사』에 대한 예비준공검사를 실시하고 지적사항에 대하여 사전정비 등 공사준공에 차질이 없도록 조치하고자 함.

공사현황

○ 공 사 명 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사

○ 공사개요

- 위  치 : 서초구 우면동 446-5일대(강남순환도로 선암교 하부)

- 규  모 : 부지조성 6,459㎥, 제설전진기지 및 직원대기실 등

○ 총공사비 : 24억 (도급비 2,136백만원)

○ 공사기간 : 2017. 09. 13. ~ 2018. 05. 31.

○ 감독기관, 감리사(분야별)

- 서울시설공단(토목), 하스종합건축사사무소(건축)

○ 시 공 사 : 우륭건설(주)외 1

예비준공검사 시행개요

○ 일    시 : 2018. 05. 08.(화) 14시 ~

○ 장    소 : 남부도로사업소 제설전진기지 조성공사 현장

○ 점 검 자

- 도시기반시설본부 : 이민영(토목), 박희정(전기), 최대진(기계)

- 유지관리기관(남부도로사업소) : 김영준(청사관리)

- *********************

○ 입 회 자

- 사업주관부서 : 배정근(도로관리과 담당)

- 위탁감독자(서울시설공단), 건축․전기 등 분야별 감리자

- 분야별 시공사 현장관계자

○ 지적사항

- 23건(붙임 참조)

행정사항

○ 외부전문가 자문비 지급 : 150,000원(150,000 ×1인/2시간초과)

- 예산과목 : 안전총괄본부 도로관리과, 도로관리(6개도로사업소),

사무소 환경개선(도시개발), 도로사업소 청사신축,

시설비 및 부대비, 시설부대비

※ 2013년 예비준공검사 지침(기술심사담당관-2158호,2014.2.6.)

- 계약금액 10억원 이상 외부전문가와 합동으로 예비준공검사 실시

향후계획

○ 지적사항에 대하여 분야별(토목, 전기, 기계, 건축 등) 담당부서 및 감리(감독)자에게 통보하여 준공전 조치 예정

붙 임 : 1. 예비준공검사 점검자 서명부 1부.

2. 예비준공검사 전문가 서명부 1부.

3. 예비준공검사 점검결과서 1부. 끝.