문서번호	설비부-6179
결재일자	2018.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		여인웅	05/10 권오식
협조
	주무관		김현욱

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사』

관급자재 구매 검토 보고

2018. 05.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사』

관급자재 구매 검토 보고

우리 본부에서 추진하고 있는『탄천물재생센터 3차(총인)처리시설 설치공사』에 소요되는 설비분야(기계·전기·통신) 관급자재 구매 계획에 대하여 검토하고 보고 드림

Ⅰ		공 사 개 요

공 사 명 : 탄천물재생센터 총인(3차)처리시설 설치사업(설비분야)

위    치 : 서울시 강남구 개포로 625일원(탄천물재생센터 내)

규    모 : 총인처리시설 Q=450,000㎥/일

(1처리장: 245,000㎥/일, 2처리장: 205,000㎥/일)

공사기간 : 2017. 12 ～ 2020.02.

공 사 비 : 142.5억원(기계 115억, 전기 27억, 통신 0.5억)

시 공 사 : ㈜이수에이치앤씨(기계),(주)부경일레콤(전기), ㈜한일ens(통신)

감 리 단 : ㈜선진엔지니어링 외 2개사

Ⅱ		추 진 현 황

‘13.05. : 물재생센터 총인처리시설 설치계획 수립(행정2부시장 방침)

‘14.08. : 물재생센터 3차(총인)처리시설 설치계획 방침

‘15.09. : 기본 및 실시설계 용역 착수

‘17.03. : 실시설계 용역 준공

‘17.12. : 기계공사 계약 및 착공

‘18.01. : 전기공사 및 통신공사 계약

‘18.03. : 공법사 기자재(코오롱e엔지니어링) 계약완료

Ⅲ		관급자재 구매 계획

구매 방법 : 조달구매 의뢰

관련 규정 : 조달사업에 관한 법률 제5조의 2(계약체결의 요청)

품목별 구매방법

(단위: 천원)

분 야	장비명	수량	규격	금액	구매 방법
기계	탈취설비	2	플라즈마, 10㎥, 120㎥	365,200	신기술인증제품
	폴리머용해설비	2	자동용해장치 1㎥	101,200	일반경쟁
	수문	20	비금속 전동	368,005	다수공급자(2단계)
	혼화조 교반기	9	수직터빈형	148,500	공법특허
	응집조 교반기	16	수직하이드로포일형	374,990	조달우수
	합류수로 교반기	2	수직 하이드로포일형 5.5kw	103,840	조달우수
	약품저장탱크	5	원통형 PE 30㎥,	175,230	일반경쟁
	약품공급펌프	19	무맥동다이아프램식	215,721	조달우수
	저류조 송풍기	4	루츠블로워 3㎥*5700mmAq	37,438	일반경쟁
	슬러지 이송펌프	8	스프르트 0.74㎥, 0.3㎥	50,820	우수조달 공동상표
	배수펌프(반류수이송)	6	수중오수펌프 0.1㎥,	23,628
	농축슬러지 이송펌프	4	일축나사식 0.23㎥	28,160
	호이스트	4	전동식 모노레일	185,575	일반경쟁
전기	수배전반(1처리장)	1	2,500KVA	703,318	중증장애인생산품
	수배전반(2처리장)	1	2,500KVA	851,616	조달우수
	감시제어반	1	총인제어반감시 1식, 화재예측감시 1식	806,039	조달우수
	프로세스제어반	1	계측설비 1식	376,772	지명경쟁
통신	영상감시장치	16	200만 화소	54,053	다수공급자

Ⅳ		향 후 계 획

`18. 5. ∼ 6월 : 관급자재 발주

`19. 08월	: 관급자재 설치 및 시운전

`20. 02월	: 준공 및 인수인계