문서번호	기전과-3997
결재일자	2018.5.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
이성도		05/10 송장현
협조
	주무관		정경성

『교통안전시설 원인자부담공사(양평동 미소지움)』

감리사 현장실정 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

강서도로사업소

(기전과)

『교통안전시설 원인자부담공사(양평동 미소지움)』

감리사 현장실정 검토 보고

우리사업소에서 승인한 교통안전시설(신호) 원인자부담공사와 관련감리사로부터 현장 실정보고서가 제출되었기에 검토보고 드림.

Ⅰ		관 련 근 거

서울경찰청 교통관리과-32311(2017.11.13.)호

㈜협우엔지니어링 협우지여 제18-359(2018.05.08.)호

Ⅱ		공 사 개 요

공 사 명 : 양평동3가 임대아파트(미소지움) 신축공사 중 교통신호기 설치공사

원 인 자 : ㈜길조경개발

공사장소 : 영등포구 양평동3가 29-1 현장 주변

공사내용 : 경보등 신설 1본

공사기간 : 2018.1.4. ~ 2018.5.20.

시공업체 : ㈜아우딘엔지니어링

Ⅲ		실정보고 내용

아스팔트 횡단굴착구간 케이블 매설작업을 가공설치로 설계 변경

Ⅳ		변 경 사 유

도로 신규 포장에 의해 아스팔트 관로굴착 불가능

※ 아스팔트 전폭 포장(2017.11 영등포구청), 3년 이내 굴착허가 불가

Ⅴ		진 행 경 과

날 짜	내 용	시행자	비 고
‘17. 11.	도로 전폭 포장	영등포구청
‘17. 11. 13.	규제 하달	서울지방경찰청
‘17. 12.	공사 승인 요청	길 조경개발
‘18. 01. 04.	공사 승인 통보	강서도로사업소
‘18. 02. 02.	도로굴착 불허	영등포구청
‘18. 03. 29.	준공검사	협우지여엔지니어링	보완요구
‘18. 04. 17.	공사기간 연장 승인	강서도로사업소
‘18. 05. 08.	현장 실정보고	협우지여엔지니어링

Ⅵ		검 토 결 과

현장 실정보고대로 설계변경을 조건부로 승인 하고자함

승인조건(조건부)

- 선로 지중화를 조건으로 승인된 공사로 도로굴착 가능일(개량 한 날부터 3년)        이후 선로 지중화 사유 발생 시 원인자비용부담으로 선로 지중화 할 것

Ⅶ		행 정 사 항

감리사 현장 실정보고에 대한 승인 및 유관기관 통보

준공승인 요청 시 설계변경 승인조건을 원인자가 수용할 경우 준공처리

붙임 1. 현장실정보고서(협우지여엔지니어링) 1부.

2. 설계도면(변경전후) 1부.  끝.