문서번호	치수과-1711
결재일자	2018.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
김동식		代권혁제	05/10 최진석
협조

『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사』

현안사항 실정보고

2018. 5.

한강사업본부 치수과

『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사』

현안사항 실정보고

□ 공사내용

❍ 규    모 : 저수로 준설 34,000㎥, 취수장 준설 20,200㎥

사토운반 147,200㎥

❍ 공 사 비 : 3,325백만원

❍ 사업기간 : ‘18. 3.09~’18.11.03

❍ 시 공 사 : 관악산업 주식회사

❍ 감 리 사 : 주식회사 정엔지니어링

□ 건설사업관리자 보고내용

▣ 관련근거

❍ 정(한강) 2018-5호(2018.4.30.)

▣ 보고내용

❍ 사토장 변경

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고 (적용단가)
운반위치	김포시 통진읍 고정리	인천 남동면 운연동	-
운반거리	L=28.40㎞	L=32.85㎞	L=4.45㎞
운반단가	D/T24ton:10,573원/㎥	D/T24ton:11,146원/㎥	573원
수 량	저수로 127,000㎥		-
검토내용	운반거리 증가로 단가가 증액되었으나, 도급자와 협의하여 공사비 증액없이 변경			10,573원

❍ 당초 설계된 김포시 통진읍 사토장은 매립이 완료되어 반입이 정지되었으며, 대체 사토장을 책임건설사업관리자 현장확인 및 적정성을 검토하여 변경 하고자 함.

□ 공사비 비교

(단위 : 천원)

구 분	당 초	변 경	증⦁감	비 고
사토운반
- 운 반 비	1,342,772	1,342,772	-

□ 조치의견

❍ 책임 건설사업관리자의 실정보고 내용과 같이 원활한 공사추진을 위해 사토장을 변경을 승인하고, 추후 설계변경시 반영코자 함.

※ 신규공종은 설계단가에 낙찰율(86.962%)적용하여 반영.  끝.