문서번호	시설보수과-2372
결재일자	2018.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
최승룡		윤승범	05/10 이성재
협조

『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역』

시 행 계 획 보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018.05.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역』

시 행 계 획 보 고

우리센터에서 추진한 『청계천 차집관로 정밀조사용역』 시행결과 상태불량 구간에 대하여 아래와 같이 정밀안전진단을 시행하고자 함.

1		관련규정

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제12조 제1항(정밀안전진단의 실시)

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법시행령 제10조 제1항(정밀안전진단의 실시)

2		용역개요

□ 용 역 명 : 청계천 좌안 차집관로 정밀안전진단 용역

□ 위    치 : 청계천 좌안(정릉천 합류부 ~ 신답 빗물펌프장)

□ 용역기간 : ‘18.05. ~ ’18.11.

□ 사 업 비 : 88,550천원(설계금액)

□ 용역내용 : □2.4*2.4~2.8*2.8m, L=1,108m

3		용역 추진방향

□ 청계천 차집관로 정밀조사 결과 상태평가 및 안전성평가 등 종합평가

□ 원만한 기능유지를 위한 유지관리 계획수립

4		향후 계획

□ 2018.05. : 기술용역 타당성 심사요청 및 계약의뢰(긴급)

□ 2018.06. : 계약 및 착수

□ 2018.11. : 용역준공

붙임 : 1. 설계서 1부.

2. 과업내용서 1부.    끝.