문서번호	도로보수과-4354
결재일자	2018.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도로보수과장	강서도로사업소장
김동민		김권일	05/11 김용제
협 조
	관리단속과장			代김태식

2018년 노후포장도로 정비공사

(강서2구역) 아스콘규격 변경

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

도 로 보 수 과

2018년 노후포장도로정비공사(강서2구역) 아스콘 규격 변경

		관련근거

❍ 도로관리과-6345(2014.4.22.) 아스팔트 콘크리트 유지보수 공사시방서

❍ 도로보수과-4187(2018.5.8.) 2018년 노후포장도로 정비공사(강서2구역) 포장물량

및 단면 변경 보고

		현 황

❍ 공 사 명 : 2018년 노후포장도로 정비공사(강서2구역)

❍ 사 업 비 : 2,900백만원

(도급비 740백만원, 관급비 1,260백만원, 이설비 및 기타 900백만원)

❍ 계 약 자 : 태인개발㈜ 대표 이원오

❍ 공사기간 : 2018. 4. 4 ~ 2018. 12. 14

❍ 계약금액 : 641,400,160원

❍ 공사개요 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기 t=5cm~10cm, A=943a

❍ 공사구간 : 구로동로(AK플라자 구로본점~남구로역4번출구) 외 7개노선

❍ 1등급 아스팔트 콘크리트 구매

- 계 약 자 : ㈜검단아스콘 곽순자

- 구매내역

구분	규 격	단위	수량	단가	금액
일반아스팔트 콘크리트	WC-3, t=20㎜, 1등급, 표층용, PG64-22	톤	10,203	78,400	799,915,200
개질아스팔트 콘크리트	WC-3, t=20㎜, 1등급, 표층용, PG76-22	톤	500	93,100	46,550,000
고내구성아스 팔트콘크리트	개질SMA, t=13㎜, 1등급, 표층용, PG76-22	톤	1,000	113,186	113,186,100
합 계			11,703		959,651,300

		적용기준

❍ 아스팔트 공용성 등급 기준 콘크리트 적용 기준

일반적으로 공용성 등급 PG 64-22 아스팔트를 사용하되, 자동차 전용도로,          주간선도로중 교통량이 많은 교차로, 신호대기 지역, 오르막 구간 및 지정체가          심한 도로와 중교통이 통행하여 소성변형 발생 위험이 높은 버스전용차로 등의          지역은 PG 76-22 이상의 아스팔트의 적용을 검토

		아스콘 규격 변경

❍ 대    상 : 안양천로(양화교↔오목교)

❍ 공사개요 : t=5㎝, A=657a

❍ 아스콘 규격 변경

- 당 초 : WC-3, PG 64-22, 6,957톤, 545백만원

- 변 경 : WC-3, PG 76-22, 6,957톤, 647백만원

❍ 변경사유

- 안양천로는 교통량이 많고, 출퇴근시 차량의 지·정체가 많이 발생되며 특히    곡선구간이 많아 일반아스팔트콘크리트 보다는 개질아스팔트콘크리트로 포장    하는 것이 도로 유지관리에 적합하다고 판단되어 아스콘 규격을 변경

		조치계획

❍ 아스콘 물량 증감사항은 추후 설계변경에 반영코자 합니다.

- 개략공사비 : 증 102백만원.

붙임 : 공사시방서 1부. 끝.