문서번호	시설관리과-8368
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	시설관리과장
최지영	05/11 박은선
협 조

작업지시 및 준공기한 변경시행 보고

2018. 5.

강남수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

작업지시 및 준공기한 변경시행 보고

「2017년 서초구 관내 상수도공사」에서 「2018년 서초구 관내 상수도공사」로 연간단가 업체 변경으로 인해 급수공사 작업 지시 및 준공 기한이 변경되어 이를 보고드림

Ⅰ		보고요지

○ 장기계속 연간단가 업체 변경

- 2017년 서초구 관내 상수도공사: 스타건설(주) 대표 김기현

- 2018년 서초구 관내 상수도공사: 주식회사 푸르내건설 대표 박정아

Ⅱ		보고사항

○ 작업지시 건별 기존 및 변경 공사 기간

연번	지시번호		공사위치		공사개요 (구경㎜*거리m)	공사기간변경
	당초	변경				기존공사기간		변경공사기간
1	신설289	신설8	방배동	830-24	30*3	04-23	05-11	05-14	05-23
2	신설290	신설9	방배동	894-20	20*2	04-23	05-11	05-14	05-23
3	신설291	신설10	방배동	903-17	25*3	04-26	05-11	05-14	05-23
4	신설292	신설11	방배동	811-5	25*3	04-26	05-11	05-14	05-23
5	신설293	신설12	방배동	6-9	30*4	04-26	05-11	05-14	05-23
6	신설295	신설13	양재동	65-1	40*3	04-26	05-11	05-14	05-23
7	신설300	신설14	방배동	593-11	30*2	04-26	05-11	05-14	05-23
8	신설301	신설15	서초동	1327-19	40*3	04-27	05-11	05-14	05-23
9	개량155	개량2	방배동	946-30	폐전	04-17	05-11	05-14	05-23
10	개량156	개량3	서초동	1506-38	20	04-20	05-11	05-14	05-23
11	개량159	개량4	양재동	342-11	앵글밸브교체	04-25	05-11	05-14	05-23
12	개량160	개량5	방배동	966-22	폐전	04-26	05-11	05-14	05-23
13	개량161	개량6	서초동	1438-16	앵글밸브교체	04-27	05-11	05-14	05-23
14	교체장애16	교체장애2	서초동	1306-3	대형계량기교체	04-10	05-11	05-14	05-23
15	교체장애18	교체장애3	서초동	700-0	대형계량기교체	04-10	05-11	05-14	05-23
16	뚜껑121	뚜껑3	잠원동	36-8	뚜껑교체	04-25	05-11	05-14	05-23
17	간선배관3	간선배관1	서초동	1360-22~23	100*70	04-20	05-31	05-14	05-23

Ⅲ		변경사유

○ 신축공사 공사지연에 따른 작업기한 연기 및 연간단가 계약업체 변경과 관련한 설계변경 절대 소요기간 필요에 따른 작업 재지시

- 당초: 2017년 서초구 관내 상수도공사(2017.6.30.계약만료)

- 변경:2018년 서초구 관내 상수도공사(착공일 2018.5.2.)

○ 상기 이유로 지체상금 미부과하고자 함

Ⅳ		조치사항

○ 작업지시 변경사항에 대하여 주식회사 푸르내건설 대표 박정아에게 통보하고자 합니다.  끝.