의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-7110	(		)
접 수		(		)
결재일자	2018.5.11.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	서울특별시의회의장(의 사 담 당 관),서울특별시의회의장(환경수자원수석전문위원),기획담당관,물순환정책과장,jds5112@hanmail.net(진두생의원)

주무관	치수관리팀장	하천관리과장	물순환안전국장		결재
송석주	지승현	손경철	05/11 한제현
협 조

제 목	의원 요구자료 제출(요구번호 453번, 진두생 의원, 환경수자원위원회)

시의원(진두생 의원) 요구자료(453번, 신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사)를 붙임과 같이 제출 합니다.

따로붙임 : 시의원 요구자료 1부.  끝.

진두생 의원(환경수자원위원회, 자유한국당)

1. 2011년도 「서울대심도 빗물 배수관 사업계획」관련 추진현황

□ 신월빗물저류배수시설 등 방재시설확충공사 추진현황은 다음과 같습니다.

1. 사업목적

◦상습침수 지역인 강서·양천 가로공원길 일대의 수해피해 최소화를 위해 빗물저류 배수시설 등 방재시설을 설치하여 침수 예방

※ 2010년 6,071가구/ 2011년 1,182가구 침수피해

2. 사업개요

◦위     치 : 양천구 신월1동 234-11 ~ 양천구 목동빗물펌프장

◦사업내용 :

- 저류용량 : V=320,000㎥

- 빗물저류배수 터널(L=3.6㎞, 내경 10m)

- 유도터널 2개소(L=1.1km, 내경 5.5m)

- 수직구 6개소(내경 5.4m, 유입 3, 유출 1, 기타 2)

◦사업기간 : 2011.01.27 ~ 2019.06(예정)

◦총사업비 : 138,004백만원(국비:시비=25%:75%)

□ 지역특성(양천구 신월동, 강서구 화곡동) 및 침수피해 현황

◦분지형 저지대 및 하수관로 경사부족으로 상습 침수피해 발생

※ 2010년 6,071가구 /  2011년 1,182가구 침수피해

◦‘12.07.19 : 공사발주 (턴키방식)

◦‘13.05.01 ~’14.05 : 수리모형 실험 착수 및 준공

◦‘14.12.31 : 본공사 계약

◦‘15.01.01 ~12.31 : 2차공사 착공 및 준공

◦‘16.01.21 ~12.21 : 3차공사 착공 및 준공

◦‘16.06.25 ~06.30 : 사유지 보상지연으로 작업중지

◦‘16.12.27 : 4차 공사착공

◦‘17.07.31 : 터널 전구간 굴착완료

◦‘17.08.05 ~ 10.15 : 수방대비 비상저류계획에 따른 터널내 작업중지

◦‘18.02.02 : 4차 공사준공

◦‘18.02.08 : 5차 공사착공

◦‘18.05 현재 : 터널 구조물 공사 진행 중

◦‘19.06.30 : 전체공사 준공예정

□ 조감도

□ 위 치 도

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	지승현
	☎2133-3870	담당자	송석주
	작 성 일 : 2018.05.09