위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	예산변경 요청(중랑물재생센터 시설현대화)

1. 물재생시설과-6364(2018.5.10.)호와 관련입니다.

2.「중랑물재생센터 시설현대화사업」의 초기우수처리수 소독설비 준공 전 설치 등을       위해 아래와 같이 예산변경 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 예산변경 내용

(단위 : 백만원)

예산과목				예산현액	증감현황		변경 후 예산현액
관	항	세항	통계목		증	감
자본적지출	유형자산 취득	구축물	계	13,003	101	△101	13,003
			시설비 (401-01)	12,852	-	△101	12,751
			감리비 (401-02)	149	101	-	250
			시설부대비 (401-03)	2	-	-	2

나. 변경사유 : 초기우수처리수 소독설비 준공 전 설치를 위한 책임감리 용역기간                        연기 필요에 따른 감리비 추가 확보(※ 시설비는 시공사 부담 시행)

붙임 : 예산변경 관련 방침서 1부. 끝.

	물재생시설과장
전문관	양해선		물재생시설팀장	이웅희		물재생시설과장	05/11 이인근
협조자
시행	물재생시설과-6488	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15(서소문동)	/
전화	02)2133-3826	/전송	02)2133-1043	/		/	대시민공개