문서번호	교량안전과-8262
결재일자	2018.5.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
배상현		손창익	05/11 한유석
협조

[월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역]

준 공 기 한  연 기 검 토

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5

교량안전과

(강북일반교량팀)

[월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역]

준 공 기 한  연 기 검 토

우리과에서 현재 시행중인 『월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역』의 준공기한 연기를 위한 검토 보고임.

Ⅰ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 월계2교 외 6개소 내진성능평가 및 내진보강공사 실시설계용역

□ 용역기간 : 2018.01.15. ~ 2018.05.14

□ 도 급 비 : 150,403천원

□ 용 역 사 : 에이스톤엔지니어링(주)  대표 이영순

Ⅱ		그 간 추진사항

□ ’17.12.21 : 실시설계용역 발주

□ ’18.01.08 : 용역계약

□ ’18.01.23 : 착수보고

□ ’18.03.07 : 중간보고 및 1차 자문회의

□ ’18.03.29 : 최종보고 및 2차 자문회의

□ ’18.04.17 : 특정공법 선정심의 개최

Ⅲ		준공기한 연기 검토

□ 연기 내용

당 초	변 경	비 고
2018.01.15.∼2018.05.14	2018.01.15 ∼ 2018.05.31	17일 연기

□ 연기 사유

- 최종 보고서 보완 및 특정공법 심의 관련 내용 반영에 필요한 절대공기 부족

□ 지체상금 : 미부과

Ⅳ		행 정 사 항

□ 재무과 통보하여 준공기한 연기 처리.

붙임 : 합의각서 1부.  끝.