문서번호	시설과-1032
결재일자	2018.5.11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	공원조성팀장	시설과장	동부공원녹지사업소장
최종성	송복식	진병규	05/11 이용태
협 조

『보라매공원 유아숲체험장』

조성사업 실시설계 용역 준공 보고

2018. 5.

동부공원녹지사업소

(시설과)

『보라매공원 유아숲체험장』

조성사업 실시설계 용역 준공

보라매공원 유아숲체험장 조성사업 실시설계 용역이 완료되어 아래와 같이 보고 드림.

□ 용역 개요

○ 용 역 명 : 보라매공원 유아숲체험장 조성사업 실시설계 용역

○ 위    치 : 보라매공원 북동산 일대

○ 용역기간 : 2018. 3. 12. ~ 4. 30.

○ 도 급 자 : ****************

○ 사 업 비 : 200백만원

○ 계약금액 : 금11,400,000원

□ 추진 경위

○ 2018.01.18 : 유아숲 체험시설 조성 및 운영 계획 시달(←市자연생태과)

○ 2018.01.23 : 추진계획수립

○ 2018.01.24 : 기술용역 타당성 심사 결과 통보(적정)

○ 2018.03.07 : 예산재배정(市자연생태과→동부공원녹지사업소)

○ 2018.03.12 : 실시설계 착수(준공일:4.30)

○ 2018.03.13 : 계획안 중간보고(1차) 및 사업제안자 의견청취

○ 2018.03.20 : 현장 자문회의 (******************)

○ 2018.03.27 : 계획안 중간보고(2차)(동부공원녹지사업소)

○ 2018.04.19 : (市)자연생태과 설계심의

○ 2018.04.30 : 용역준공 및 설계심의 결과 수령

○ 2018.05.09 : 최종보고(심의 결과반영) 및 자문위원 설명

□ 설계심의 결과

○ 일    시 : 2018.04.19.(목) 09시30분

○ 장    소 : 푸른도시국 회의실

○ 심의내용 : 사업목적 및 취지의 적합성, 디자인 등 설계 전반 등

○ 주요내용

심의내용	조치결과	비고
******************************************************************************	*******************************************************	**
****************************************************	*********************************	**
************************************	******************************************	**
*********************************	****************************	**
****************************************************************	************************************************	**
****************************************************	*************************************	**
*********************************	*********	**
**********************************	*************************	**
***************************************************************************	*************************************************	**
*******************	******************	**
****************************************	*****************************************	**
*************************************	********************	**
*****************************	******************************************* *******************************	***
**********************************************************	*********************************	**

□ 향후 계획

○ 계약부서(공원운영과)에 준공 통보 및 준공처리

○ 설계심의 결과보고서 작성하여 자연생태과에 통보

○ ‘18.3.20일 현장자문회의 자문위원(********) 자문비 지급

□ 행정사항

○ 자문비 지급**********

- 소요예산 :200,000원

※ 예산편성기준 기본수당 100,000원/인

- 예산과목 : 자연생태과, 생태계 복원 및 보전과 야생동식물 보호, 생태계 보전사업, 유아숲체험시설 조성(경상), 사무관리비(100-201-01)

□ 향후 추진 일정

○ 2018. 05. 13   : 준공 통보 및 준공처리(→공원운영과)

○ 2018. 05.       : 공사 발주

○ 2018. 06. ~ 08 : 공사 시행 및 준공

○ 2019. 01. ~    : 유아숲 운영(공원여가과)

붙임 : 1. 보고자료 1부

2. 자문의견서 각1부. 끝