문서번호	자활지원과-6526
결재일자	2018.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자활정책팀장	자활지원과장
이진산		배기선	05/14 오성문
협조

노숙인 희망원룸 소방설비 기능보강계획

2018. 5.

자활지원과

노숙인 희망원룸 소방설비 기능보강계획

노숙인 자립지원을 위해 시립 브릿지종합지원센터에서 운영하는 ‘희망원룸’의 화재안전을 위해 기능보강을 지원하고자 함

1				시설개요

□ 시설개요

○ 위    치 : 서대문구 북아현로 2길 6-3

○ 규    모 : 264.92㎡(지하1층, 1~4층)

○ 건축연도 : 1997. 1. 17.

○ 시설구성 : 개인실 27개, 사무실, 공동샤워･세탁실, 공동휴게실 등

○ 운영기관 : 시립 브릿지종합지원센터(대표 이문재)

□ 소방시설 현황 및 문제점

○ ’12년 시 지원으로 지하1층, 2~4층에만 간이스프링클러· 화재감지기 설치, 지상 1층은 미설치

○ 화재 발생시 소방서로 자동연락되는 자동화재속보설비 미설치

○ 시설이 원룸형 고시원 구조로 화재발생시 안전문제 취약

2				지원계획

□ 지원방향

○ 화재안전을 위해 건물 전층 간이스프링클러 및 화재감지기 설치

○ 화재발생시 즉각 대응을 위한 자동화재 속보설비 설치

○ 생활실 내 취사·흡연 금지 등 화재안전 관리 철저

○ 시설 화재안전 관련 정기·수시 점검 관리

□ 지원내용

○ 지상1층 생활실·복도 스프링클러 설치

- 공사내역 : 스프링클러 가동을 위한 소방 설비·전기공사

- 설치면적 : 59㎡

○ 자동화재속보설비 설치

- 공사내역 : 자동화재감지 및 속보기 설치

- 운영범위 : 희망원룸 전 시설

□ 소요예산

○ 설치예산 : 22,240천원

- 스프링클러 설치 : 360천원 × 59㎡ = 21,240천원

- 자동화재속보설비 설치 : 1,000천원

○ 예산과목

- 노숙인보호 및 자활지원, 거리노숙인 보호, 민간자본사업보조(100-402-01)

3				행정사항

□ 추진일정

○ 희망원룸 기능보강사업계획서 제출   : ’18. 5. 15.(화).

○ 사업계획서 검토 및 보조금 교부     : ’18. 5. 17.(목).

○ 소방시설 설치공사 및 결과보고      : ’18. 5 ~ 6월.