문서번호	설비부-6438
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
박도원		오삼록	05/14 권오식
협조

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 연기 검토보고

(냉․난방기, 공기순환기, 지열시스템)

2018. 5.

도시기반시설본부

( 설 비 부)

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』

관급자재 납품기한 변경 검토보고

『남산예장자락 재생사업 기계설비공사』에 소요되는 관급자재 설치시기가 미도래하여 납품기간 연기에 대해 검토 보고 드림.

1		공 사 개 요

□ 공 사 명: 남산예장자락 재생 기계설비공사

□ 규     모: 공원 15,154㎡, 주차장 10,015㎡(버스 39대, 장애인 2대)

□ 공사기간: 2017. 09. ~ 2019. 2.

□ 공 사 비: **************************************

□ 계 약 자: ㈜지정이앤씨 외 4개사

2		관 련 근 거

□ 감리 제2018-126호(2018.05.10.) 관급자재 납품기한 연기요청

□ 방제시설부-5034호(2018.04.18.) 준공기한 연기 검토 보고

○ 건축·토목공정 준공기한 연기

(당초) ‘17. 08. 31. ~ ’19. 02. 27.

(변경) ‘17. 08. 31. ~ ’19. 12. 31.

3		검 토 내 용

□ 선행공정(건축·토목) 준공기한 연기로 인한 기계설비공사 관급자재 납품기한 연기 검토

□ 전기히트펌프 냉난방기(실내기) 외 5건 계약현황

(단위 : 천원)

연번	계약건명	계약금액	납품기한	계 약 자	비 고
1	냉난방기(실내기)	******	‘18.12.31.	엘지전자(주)
2	냉난방기(실내기 추가)	*****
3	냉난방기(옵션)	******
4	공기순환기	******	‘18.05.30.
5	공기순환기(추가)	*****
6	지열시스템	*******	‘18.12.31.	㈜제이앤지
합 계		*******

□ 납품기한 연기

○ 연기사유: 선행공정의 공기연장에 따른 관급자재 납품기한 조정

○ 관급자재별 연기기한

연번	계약건명	계약금액	당초	변경	비 고
1	냉난방기(실내기)	******	‘17.08.11.~ ‘18.12.31.	‘17.08.11.~ ‘19.12.31.	증 365일
2	냉난방기(실내기 추가)	*****			증 365일
3	냉난방기(옵션)	******			증 365일
4	공기순환기	******	‘17.08.14.~ ‘18.05.30.		증 580일
5	공기순환기(추가)	*****			증 580일
6	지열시스템	*******	‘17.11.02.~ ‘18.12.31.		증 365일

(단위 : 천원)

□ 건설사업관리단 의견

○ 선행공정의 공사 연기에 따른 관급자재 납품기한을 선행공정 준공기한(‘19.12.31.)에 맞춰 연기하고자 함.

4		조 치 의 견

□ 선행공정(건축·토목) 공사기한 연기에 따른 관급자재 납품기한 연기가 감리자 검토의견과 같이 적정하다고 판단되므로 건설총괄로 변경계약 의뢰하고자 함.

○ 귀책소재: 서울특별시 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  감리검토의견서 1부.  끝.