문서번호	설비부-19221
결재일자	2017.11.15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
박기범		임현근	11/15 권오식
협조

『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차1회, 1차1회)

2017. 11.

도시기반시설본부

(설비부)

『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사』

설계변경 검토보고(총차1회, 1차1회)

『중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사』관련 건설사업관리기술단에서 제출한 경관조명설비 설계변경(총차,1차) 건에 대하여 검토 보고함

1		공사현황

▢ 공 사 명 : 중랑천 초안산 앞 보행교량 설치 전기공사

▢ 공사위치 : 노원구 월계동 월계역 ~ 하계동 청구아파트(중랑천)

▢ 공사규모 : 보행교량 설치 폭4.5m, 연장 191m, 닐센아치교

경관조명설비, CCTV설비, 승강기설비

▢ 공사기간 : (총차) 2017. 03. 24. ~ 2018. 04. 30.

(1 차) 2017. 03. 24. ~ 2017. 12. 31.

▢ 도 급 비 : 341백만원

▢ 감 리 단 : ㈜대한콘설탄트

▢ 시 공 사 : 평화전기건설공사

2		관련근거

▢ 실정보고 승인 요청 및 통보

- 대콘(초안산) 제17-254호 (2018. 09. 19.)

- 설비부-16233호 (2017. 09. 21.) : 경관조명설비공사

▢ 전기공사(총차1회, 1차1회) 설계변경 승인 요청

- 대한(감본) 제17-360호 (2017. 11. 14.)

3		설계변경 검토사항

▢ 설계변경 사유

○ 총차 공사 설계변경 사유

- 경관조명설비 관련 실정보고 승인사항 반영

○ 1차 공사 설계변경 사유: 내역변경

- 경관조명설비 관련 실정보고 승인사항 반영

- 토목공정을 반영하여 토공 부위공사(경관조명․엘리베이터 인입공사, 가로등 설치공사 등)를  2차수 공사로 이월

- 교량 구조물 경관조명설비 공사를 선행하여 진행

- 산재보험, 고용보험, 건강보험, 노인장기요양보험, 연금보험, 퇴직공제부금,

산업안전보건관리비 조정

▢ 설계변경 내용

(단위: 원)

공 종	설계변경 내용	변경사유	증․감액
경관조명 설치공사	LED경관조명기구 전원의 전압강하로 인한 부점등 검토	원활한 점등 위해 회로분리	증) 338,470
	경관조명과 보안등 동시 점소등에 따른 회로 분리 건	개별제어 가능하도록 회로분리하여 시설물을 효율적으로 관리	-
	난간외측(측면) 조명 취부방법 및 위치조정	-볼트용접 방식으로 변경하여 도장손상 방지 -브라켓 규격 최소화 -난간 빛 조사면 효율적 조정	감) 20,764,100
	아치외측(측면) 조명 취부방법 검토	-볼트용접 방식으로 변경하여 도장손상 방지 -파손시 교체 가능하도록 변경	증) 1,830,150
직접공사비			감) 18,595,480
제 경 비			감) 5,226,810
부가가치세			감) 2,382,200
합 계			감) 26,204,210

▢ 공사비 증․감 대비표 (설계변경 총차 1회)

(단위: 원)

공 종	공사비			비 고
	당 초	변 경	증․감
***********	***********	***********	**********
***********	**********	**********	*
**********	**********	**********	*
***************	*********	*********	*
*************	**********	**********	*
*****	***********	***********	**********
*******	**********	**********	*********
*******	***********	***********	**********
*****	**********	**********	*********
*******	***********	***********	***********

▢ 공사비 증․감 대비표 (설계변경 1차 1회)

(단위: 원)

공 종	공사비			비 고
	당 초	변 경	증․감
***********	**********	***********	**********	****
***********	*********	*	*********
**********	*********	*	*********
***************	*********	*	*********
*************	*********	*********	*********
*****	***********	***********	*********
*******	**********	**********	*********
*******	***********	***********	*
*****	**********	**********	*
*******	***********	***********	*

▢ 설계변경 현황(총차, 1차)

(단위: 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증·감)
총 차
공사기간	2017. 03. 24.~ 2018. 04. 30.	2017. 03. 24. ~ 2018. 04. 30.	변경없음
도 급 비	***********	***********	**********
2 차
공사기간	2017. 03. 24.~ 2017. 12. 31.	2017. 03. 24. ~ 2017. 12. 31.	변경없음
도 급 비	***********	***********	***********

▢ 감리원 검토 의견

- 기 실정보고 승인사항에 대하여 적용단가를 검토한 후 총차 분에 적정하게 반영하였고,

- 1차분 도급공사는 현재 토목공정의 공사 진행사항을 반영하여 공종 및 물량을 변경․조정하였으며, 도급계약내역 검토결과 적정함.

4		보고자 의견

▢ 책임감리원의 설계변경 검토내용이 적정한 것으로 판단되어, 설계변경(총차1회, 1차1회) 계약을 의뢰하고자 함.

붙임  건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.