문서번호	도시철도토목부-5769
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		토목3과장	도시철도토목부장
정삼기		호경수	05/14 이도헌
협 조
	주무관			이재선

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역」 계약금액 조정(총괄9회 및 9차1회) 검토 보고

2018. 5.

도시기반시설본부

도시철도토목부

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역」

설계변경(총괄9회 및 9차1회) 검토 보고

「서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역」인 ㈜유신으로  부터 설계변경 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임.

※ 관련문서 : 감리 18-391호(2018. 5. 14.)

1		용역개요

○ 용 역 명 : 서울지하철 9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역

○ 공사금액 : 6,369백만원(9차 1,069백만원)

○ 용역기간 : ’09.11.18. ~ ’18.12.31.(9차 ’18.01.01. ~ ’18.12.31.)

○ 감 리 단 : ㈜유신 외 2개사

2		추진경위

○ ’09.11.18. : 9호선 3단계 921공구 건설공사 전면책임감리용역 계약

○ ’16.11. 3. : 9호선 기본계획 변경고시(국토교통부고시 제2016-713호)

- 사업기간 연장 : 2015년 → 2018년

○ ’11. 2.15~’17.12. 5. : 물가변동 및 계측,지중감리투입, 공사기간 연장에 따른 계약금액 조정

(1~8회 설계변경)

3		관련근거

○ 서울지하철9호선 3단계 921공구 전면책임감리용역 입찰안내서제4장 계약조건(지방자치단체 용역계약 일반조건) VI. 과업내용의 변경 및 계약금액의 조정 1. 과업내용의 변경

4		변경내용

○ 감리 투입기간 조정

직책	직책	등급	성명	감리원 투입 계획	비 고
토목 (유신)	책임	감리사	박성찬	2010. 07. 01 ~ 2018. 04. 18(당초)	증2.4개월 (총괄업무)
				2010. 07. 01 ~ 2018. 06. 30(변경)
	보조	감리사보	문성공	2010. 12. 17 ~ 2018. 10. 31(당초)	(공사담당)
				변경없음
	보조	감리사보	송인섭	2010. 09. 15 ~ 2018. 12. 31(당초)	(공무담당)
				변경없음

○ 계약변경 현황

구 분		당 초	변 경	증‧ 감	비고
계약 금액	총괄9회	6,369,200,000원	6,397,200,000원	증 28,000,000원	토목분야
	9차1회	1,069,061,000원	1,097,061,000원	증 28,000,000원	토목분야
계약 기간	총괄9회	2009.11.18 ~ 2018.12.31	변경없음	-
	9차1회	2018.01.01~ 2018.12.31	변경없음	-

※ 총괄9회 및 9차1회분 책임감리원 배치기간 연장에 따른 계약금액조정  (기간변경 없음) 사항임.

5		책임감리원 검토의견

○ 총괄분은 토목,건축,기계,전기 총괄업무를 수행중인 책임감리원의 종합시운전, 시설물 검증시험 등이 진행되고 있어 원활한 감리업무 수행을 위해 상기 검토 내용과 같이 계약금액조정하여 변경코자 변경설계서를 제출하며,

○ 차수분은 총괄계약 변경에 따라 책임감리원 배치기간 연장을 반영하여 진행중인 9차 감리용역의 계약금액조정에 관한 사항으로서 변경 시행코자 변경설계서를 제출하오니 조치 요망.

6		조치계획

○ 계약금액 조정(총괄9회 및 9차1회)요청에 대하여 책임감리원 기간연장이 타당하다고 검토되어 계약금액을 조정하여 사업추진에 만전을 기하고자 함.

붙임  1) 감리단 공문 1부.

2) 검토의견서 1부.

3) 변경 설계내역서 1부.

4) 합의각서 1부.  끝.