문서번호	급수운영과-11325
결재일자	2018.5.14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장		강서수도사업소장
강환희	김남구	김정수		05/14 홍순성
협 조
	주무관		정헌석

’18년 장기계속 단가계약 발주계획

(구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사)

2017.5.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

’18년 장기계속 단가계약 발주계획

’17년 구로구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사 계약업체의 계약기관이 만료됨에 따라 2018년 시설물 유지관리의 효율적인 운영을 위해  2018년 구로구시설물 연간단가를 발주코자 함

□ 공사개요

○ 공사명 : ’2018년 구로구관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(단가계약)

○ 공사개요

- 노후밸브 교체 및 변실정비 D=80~700mm, 229개소

- 기어박스정비 등(유지관리) D=300~1800mm, 11개소

○ 공사기간 : 착공일로부터 2019. 06.30일 까지

○ 예산현황

(단위 : 천원)

구분	총공사비	도급비	관급비	복구비 및 기타	기간	비고
계	652,400	424,400	78,000	15,0000	착공일 ~ ’19.6.30.
1차년도	456,680	297,080	54,600	105,000	착공일 ~ ’18.12.31.
2차년도	195,720	127,320	23,400	45,000	’19.1.1. ~ ’19.6.30.

○ 관련근거

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에관한 법률 제24·25조(단가계약)

□ 공사계획

○ 추진경과(설계내역 작성 및 설계심사)

설계서 작성		· ’17년 연간단가 공사를 발주하여 시행중인 장기계속 단가계약 공사 계약기간이 만료됨에 따라 시설물 유지관리 및 계속적인 민원처리 등을 위해 장기계속공사 발주 · 3년 평균물량 산출하여 구별로 분할하여 설계내역 작성
공사설계 심사의뢰(본부)		· 심사의뢰 : 본부 재무회계과 - 관련대호 : 급수운영과-10383(2018.5.2.) - 심사요청금액(도급액) : 437,707천원
심사결과 통보		· 관련대호 : 재무회계과-6023(2018.5.4.) · 심사결과 금액 : 424,400천원

○ 예정물량 및 집행 예정금액 산출

- 장기계속공사 절차에 따라 설계내역서의 예정물량은 3년치(’15~’17년)물량을 구별로 평균하여 산출

- 집행예정 금액은 계약기간에 소요되는 차수별 예산을 합산한 금액임

□ 향후 추진계획

○ 입칠 및 계약

- 입찰은 총 예정수량을 기준으로 표시

- 2018년도(1차년도) 계약체결은 당해연도에 이행할 금액과 총부기금액을 계약서에 명기하여 계약을 체결하고,

- 2019년도(2차년도)분은 부기한 총금액에서 1차년도 계약분을 제외한 나머지 금액에 대하여 계약체결(지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제 24조)

○ 계약기간(총 부기기간) : 착공일로부터 2019.06.30.일 까지

- 1차년도 : 착공일 ~ 2018.12.31.일 까지

- 2차년도 : 2019.01.01. ~ 06.30.일 까지

□ 기타 행정사항

○ 본 공사를 본청 재무과에 계약 의뢰

붙임 : 1. 관련공문(계약심사 결과) 1부.

2. 현장설명서 1부.

3. 설계내역서 1부. 끝.