현장 실정 보고(잠실동 86-1 배급수관)

주무관	주무관	급수운영과장		결재
김희철	한호진	05/15 김태헌
협 조

문서번호 :	급수운영과-7684

우리사업소에서 시행하는 아래 공사에 대하여 서울시설공단의 현장실정보고가 제출되어 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

현    황

공 사 명: 잠실동 86-1 외 5개소 배급수관정비공사

공사기간: 2018년 4월 11일 ~ 2018년 12월 11일

도 급 액: 금622,281,000원

계 약 자: (주)동방수기 대표 김태호

관련문서: 서울시설공단 공사감독2처-4400(2018.5.14.)호

실정 보고 내용

야간공사 4개구간(1,2,3,6구간)의 교통정리원 배치가 1일 1명으로 되어 있어, 교통량이 많은 간선도로(왕복6~8차선) 현장 여건상 교통소통 처리에 어려움이 많으며, 관할 경찰서 도로공사 신고시 교통사고 예방 및 원활한 교통소통을 위하여 교통정리원 2인 배치토록 허가되었기에 교통정리원을 1일 2명 배치하여 시공코자 함

검토 내용

간선도로 야간 공사시 공사현장 안전사고 방지 및 교통사고 발생을 방지하기 위하여 교통정리원을 1일 2인 배치함이 타당할 것으로 판단되며, 실작업일수에 맞추어 설계 변경 및 정산하고 공사장 안전관리에 철저를 기하도록 통보코자 함

조치 계획

상기 사항을 서울시설공단에 통보하고 향후 설계변경에 반영토록 회신코자 합니다.

붙임   설계도서 검토보고(공단) 1부.  끝.