문서번호	도시철도토목부-5844
결재일자	2018.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
김용선		윤방식	05/15 이도헌
협 조
	주무관			엄상민

「지하철 9호선 3단계 건설공사」

통합 공정회의 개최 결과 보고(4월)

2018. 5.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『서울지하철 9호선3단계 건설공사』
통합 공정회의 개최 결과 보고(2018년 4월)

지하철 9호선3단계 건설공사의 원활한 추진 및 적정 공정관리를 위한 2018년 4월 통합 공정회의 개최 결과를 보고 드림.

□ 회의개요

○ 일    시 : ‘18. 4. 30.(월) 14:00~16:45

○ 장    소 : 918공구 현장사무실

○ 참 석 자 : 40명

- 본   부  : 도시기반시설본부장, 도시철도국장, 도철토목부장, 도철건축부장, 도철설비부장, 분야별 담당과장, 업무담당

- 현   장  : 책임감리원 및 현장소장(918~923공구, 시스템)

- 운영기관 : 서울메트로 9호선 운영(주) 개통준비단장

□ 보고내용

○ 공구별 보고 : 회의 자료에 의거 각 공구 책임감리원이 보고

○ 부서별 현안사항 보고 : 담당과장 보고

□ 공정회의 결과

○ 분야별 요구(협조)사항

분 야	협조 요청사항
토 목	□ 수방기간이 시작되기 전까지 하수박스 등 수방과 관련된 시설물 설치 및 정비를 완료하여 주시기 바람.
건 축	□ 건축 마감부분이 설비 및 전기 작업 후 떨어지지 않도록 세밀하게 시공 및 확인하여 주시기 바람.
신호․통신	□ 수도권 교통카드시스템 개선회의를 통해 교통카드 S/W 개발, 합동시험 등 협의 결정 추진하는 업무절차를 추진 하여야 하는 바 적극 협조
운영기관	□ 시설물 검증시험 대비하여 사전점검시 보완 요구되는 사항에 대하여 5월말까지 조치완료 하여 주시기 바람.

○ 본부 요구(협조)사항

<도시기반시설본부장>

- 9호선 3단계 개통을 위해서는 현재의 일정관리가 매우 중요하다고 판단되므로 사전점검, 시설물 검증시험 등이 잘 진행될 수 있도록 확인하여 주시기 바라며, 이 기간을 통해 보완 또는 개선이 필요한 사항은 조치하여 주시기 바람.

- 마지막 남은 1%때문에 건설공사 관계자 모든 분들의 노고가 훼손되지 않도록 하기 위해서는 남은 기간의 관리가 매우 중요하다고 판단되며, 도로 및 보도 복구가 차질 없이 진행될 수 있도록 잘 관리해주시기 바람.

<도시철도국장>

- 협력업체 회생절차 진행과 관련하여 공사 관리를 잘 해준데 대해 감사를 드리며, 모니터링을 계속 시행하여 문제가 발생하지 않도록 관리하여 주시기 바람.

- 도로 중층 포장은 6월까지 완료해서 다짐에 문제가 발생하지 않도록 하시기 바람.

- 하수박스 연결부, 빗물받이 연결부 등 수방시설에 대한 차질이 발생하지 않도록 세밀하게 확인하여 주시기 바람.

- E/S, E/V 완성검사에 차질이 발생하지 않도록 관리하시기 바람.

- 개선된 공정관리 방법이 다음주부터 시행되니 공정관리에 철저를 기하시기 바람.

<도시철도토목부장>

- 도로 및 보도 복구는 6월까지 완료될 수 있도록 관리하여 주시기 바람.

- 수방기간이 시작되기 전까지 하수박스 등 수방과 관련된 시설물 설치 및 정비를 완료하여 주시기 바라며, 개구부 등으로 노면수가 유입되지 않도록 관리에 만전을 기하여 주시기 바람.

- 도로복구 공사시 미세먼지가 발생하여 시민이 불편하지 않도록 수시로 물뿌리기 등 미세먼지 관리에 철저를 기하여 주시기 바람.

<도시철도건축부장>

- 건축 마감부분이 설비 및 전기 작업 후 떨어지지 않도록 세밀하게 시공 및 확인하여 주시기 바람.

<도시철도설비부장>

- 9호선 2단계 운영사에서 9호선 3단계 건설구간 먼지 청소에 대해 감사 표시.

- 법적 검사가 5월부터 시작되므로 잘 마무리하여 주시기 바람.

<운영기관 : 서울메트로9호선 운영(주)>

- 시설물 검증시험 대비하여 사전점검시 보완 요구되는 사항에 대하여 5월말까지 조치완료 하여 주시기 바람.

<정보통신과장>

- 9호선 3단계 개통을 위해서는 수도권 교통카드시스템 개선회의를 통해 교통카드 S/W 개발, 합동시험 등 협의 결정 추진하는 업무절차를 추진하여야 하는 바 적극 협조하여 주시기 바람.

□ 행정사항

○ 금회 공정회의 시 협조요청 및 요구사항은 각 분야(공구)별로 조치 결과를 보고(제출).

붙임 : 통합공정회의 회의자료 및 현황사진 1부.  끝.

사 진 대 지

D:\FTP_HOME\Working\masking\100001\20180515\F0000065169197.hwpx
사진설명	통합공정회의		위 치		918공구현장사무실
사진설명	통합공정회의	위 치		918공구현장사무실