투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	총무과장
(경유)
제 목	계약변경 요청(여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사)

1. 재무과-16393(2018.4.5.)호와 관련입니다.

2. 서울시 재무과에서 여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사를 계약하였으나 계약준공일 오류가 있어 계약변경(정정)을 의뢰하오니 아래와 같이 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계약건명 : 여의도샛강 분류부 생태거점조성 전기공사

나. 계약금액 : 금115, 336,300원

다. 계약일자 : 2018. 04. 04

라. 준공기한 : 2018. 12. 28

마. 변경요청 내용

구 분	당 초	변 경
준공기한	2018. 12. 28	2019. 12. 28

붙임 : 계약체결서 1부.  끝.

	생태공원과장
주무관	임이환		생태공원과장	05/15 최병언
협조자
시행	생태공원과-1044	(		)	접수		(		)
우			/
전화	3780-0725	/전송	3780-0740	/		/	대시민공개