문서번호	설비부-6482
결재일자	2018.5.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
박희정		유병기	05/15 권오식
협조

『장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사』

전기공사 실정보고에 대한 검토 보고

2018. 5.

『장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치공사』

전기공사 실정보고에 대한 검토 보고

제2롯데 교통개선대책으로 비관리청 사업 추진 중인 「장지지하차도~동부간선

도로간 연결로 설치공사」에 따른 전기공사 실정보고 사항을 검토하고 보고드림.

1		사업 개요

○ 위    치 : 서울특별시 송파구 장지동 803-20 ~ 803-8 일원

○ 규    모

램프신설 : 진입연결로(1차로, B=6.0m) Ramp-A(L=638m), Ramp-B(L=455m)

교량형식 : SB ARCH 합성거더

○ 공사기간 : 2017.06.13. ~ 2019.09.30

○ 총사업비 : 36,470백만원(전기 1,094백만원)

○ 공사내용 : 가로등주 94본(신설 40, 이설 54), 분전반 3면, 교량점검등 212등, 통합폴 4본,                  신호등주 30본, 견인차량보관소 이설 등

○ 시 공 사 : 롯데건설㈜

○ 공 정 율 : 60%(전기공사는 19년 상반기 예정)

○ 감 리 사 : ㈜동일기술공사외 2개사(책임건설사업관리기술자 이진문)

○ 시 행 자 : 롯데물산㈜, 롯데쇼핑㈜, ㈜호텔롯데

2		관련 근거

○ 동감(장지-동부) 제18-79호, 실정보고(견인차량보관소내 차량차단기 및 비상벨 신규설치)

○ 협약서(장지지하차도~동부간선도로간 연결로 설치사업, 서울시 ⇔ 롯데물산외 2)

(제6조, 필요하다고 판단되는 경우 ‘사업시행자’와 ‘시’가 상호협의하여 사업비를 변경할 수 있음)

3		검토 내용

○ 시설관리공단(송파구청) 요구사항

구 분	당초 설계	요 구(안)	비 고
비상벨	설계 미반영	비상벨 작동시 사무실, 112자동신고 설정 총 6개소(실외 4, 화장실 2) 설치 문정지구대 비상벨 시스템 설치	반영
차 량 차단기	- 기존 차량 차단기 이설 (번호인식 장치 없음)	기존 차량 차단기 철거 차량번호인식 차단 시스템 설치	반영

○ 공사비 증감 현황 : 증)137백만원

구 분	당 초	변 경	증·(감)
견인차량보관소 전기공사	169,500,000	306,500,000	137,000,000
총공사비(전기공사)	1,093,889,000	1,230,889,000	137,000,000

○ 주요 공사 내용 : 붙임문서 참조

※ 송파구청 요청사항으로 협약서 제6조(사업비 조정)의 ①항에 따른 사업비 조정사유에 해당되며

‘사업시행자’와 ‘서울시’가 상호 협의하여 사업비를 조정할 수 있음

○ 감리검토의견

상기 검토 내용과 같이 차량번호 인식 시스템(차단기)은 기본설계 2차 실무 협의시           반영하기로 된 사항이었으나 설계에 누락 되었음.

비상벨 설치는 주차장내 화재 등 응급상황에 대비할 수 있고 민원인에게 안정감 및           편의를 제공하고자 하는 목적인 바, 설치함이 타당하다고 판된되며, 물가정보지에           등재된 제품으로 쌍방향 통신이 가능한 비상벨(CEC-5240)을 채택 설치코자 함.

공사비는 137백만원이 증가되며 추후 설계 변경시 반영함이 타당한 것으로 판단됨.

4		조치의견

○ 위 사업은 제2롯데월드 신축사업에 따른 교통개선대책으로 사업시행자가 직접 개설하여         시설물 일체를 우리 시에 귀속하고 사업비는 ‘올림픽대로 하부 미연결구간 도로개설사업’의         사업비와 정산하기로 한 사업으로

○ 상기 실정보고 검토결과, 건설사업관리책임기술자의 검토의견이 타당하여 실정보고 사항을         승인하고자 하며, 변경된 내용에 대해서는 설계변경소위원회 심의를 거쳐 공사금액을         확정하고자 함

붙임  1. 감리실정보고 1부.

2. 주요 공사 내용 1부.  끝.