＂마셔보면 좋은 물, 알고 보면 아리수＂ 공모당선작 우수
	중부수도사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	설계변경시행(보광배수지(1,2지) 내부방수방식공사

1. 우리사업소에서 발주하여 시행한『보광배수지(1,2지) 내부방수방식공사*』에 대해 최종 설계변경을 아래와 같이 시행 코자합니다.

가. 공 사 명 : 보광배수지(1,2지) 내부방수방식공사

나. 도 급 자 : 우제이건설*******김주연

다. 계 약 일 : 2017.08.28

라. 공사기간 : 2017.08.28.~ 2018. 5.26

마. 변경사유 : 물량감소 및 기타 제경비(보험료) 정산

바. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(수선유지비)              사. 설계변경 내역                                                         단위(원)

구 분	당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총공사비	1,046,000,000	1,006,890,000	**39,110,000
공급가액	950,909,091	915,354,546	**35,554,545
부가가치세	95,090,909	91,535,454	**3,555,455

별첨   1. 설계변경심의의결서 및 심의결과보고 각 1부.

2. 설계변경 사유서

3. 설계변경 내역서  1부.

4. 변경합의서 1부. 끝 .

주무관	김헌중		주무관	안미주		급수설비팀장	박장진		급수운영과장	代박장진
중부수도사업소장	05/16 유경애
협조자
시행	급수운영과-10194	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02)3146-2817	/전송	02)3146-2839	/		/	부분공개(5)