문서번호	설비부-6642
결재일자	2018.5.17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영일		임병국	05/17 代유병기
협조

「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[1차]」

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2018. 5.

도시기반시설본부

[설 비 부]

「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[1차]」

설계변경(정산) 검토 보고

우리본부에서 시행중인「서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[1차]」에 대해 책임건설사업관리단의 설계변경 요청사항에 대하여 아래와 같이 보고드림.

1		현 황

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사

○ 규    모 : 신관동(대수선) 지하1층/지상5층, 연면적 3,216㎡, 연구시설

별관동(신축)   지하2층/지상4층, 연면적 3,112㎡, 연구시설

○ 도 급 액 : 1차 50,000,000원 (총차 540,191,540)

○ 공사기간 : 1차 ‘17.09.28. ~ ’18.05.31. (총차 `17.09.28. ~ `19.02.27.)

○ 시 공 사 : ㈜세우엔지니어링 어연

○ 감 리 단 : ㈜한국종합건축사사무소

□ 관련근거

○ 서울바이오허브 조성(2단계) 통신공사[1차] 정산 검토보고

[한종홍릉 제2018-663호, 2018.05.16.]

2		설계변경 검토

□ 설계변경 사유

○ 1차공사분의 건강, 연금, 노인장기요양보험료 정산

○ 1차공사분의 퇴직공제부금 및 산업안전보건관리비 정산

□ 설계변경(정산) 주요내역                          (단위: 원)

공 종	당 초	변 경	증‧감	비고
건강보험료	366,695	0	감) 366,695
노인장기요양보험료	24,019	0	감) 24,019
연금보험료	537,100	0	감) 537,100
퇴직공제부금비	621,665	0	감) 621,665
산업안전보건관리비	1,038,958	1,038,454	감) 504

□ 설계변경 금액                                    (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증‧감	비고
1 차	50,000,000	47,936,000	감) 2,064,000	금회변경
총 차	540,191,540	540,191,540	-	변경없음

3		보고자 의견

○ 본 공사 건설사업관리단의 설계변경(정산) 기술의견사항을 검토한 결과, 적정한 것으로 판단되어 계약금액 변경하여 공사관리에 만전을 기하고자 함.

붙 임 : 건설사업관리단 공문 1부. 끝.