위기상황에 나와 가족의 안전, ＇서울안전앱＇ 으로 지켜주세요!
	서울특별시
수신	한국철도시설공단이사장
(경유)	수도권사업단
제목	“삼성~동탄 광역급행철도 제2공구 건설공사” 도로점용공사장 교통소통대책 변경 승인 요청 회신

1. 수도권사업단8281(2018.05.16.)호 관련하여, 교통소통대책 변경에 대해 아래와 같이 승인 통보하오니, 성실히 이행하시기 바랍니다.

2. 공사중 교통소통대책 변경으로 인하여 다른 공사와 공사기간 및 단계별 교통소통대책에 대한 문제가 발생할 경우 우리시와 추가 협의하여 주시기 바라며, 공사로 인한 교통정체 해소 및 보행자 안전사고 예방 등을 지속적으로 실시하면서 공사를 진행하여 주시기 바랍니다.

가. 도로점용공사장 교통소통대책 변경사항

지 점	변 경 전	변 경 후	변경 사유
수서역교차로	〈4단계 공사기간〉 ·2018.3.3.∼2018.4.20. 〈점용면적〉 ·1,750㎡	〈4단계 공사기간〉 ·2018.4.19.∼2018.6.5. 〈점용면적〉 ·2,234㎡	·지하 지장물 협의 지연 ·공사기간 및 차로점유 단축을 위한 점용면적 변경 (장비 진출입 시간 단축)

나. 교통소통대책 변경 조건

① 도로점용공사장 교통소통대책에 관한 조례 제6조에 따라 교통소통대책 변경 및 이행 불가능이 예견될 경우, 우리부서로 반드시 제출하기 바람

② 도로점용공사 관련하여 교통안전을 확보할 수 있도록 보행도우미를 배치하기 바라며, 현장 모니터링을 적극 실시하기 바람

③ 단계별 도로점용 상황에 맞는 교통안내표지판 및 안전시설물 설치

④ 출퇴근 시간대에 공사차량 진출입 금지, 공사시 통제수 배치 및 공사 완료후 통보

○ 도로점용허가를 받지 아니하거나 점용면적을 초과하여 점용함으로써 교통정체를 유발시키는 공사장은 점용허가 및 점용료 징수부서에 통보하여 변상금 또는 과태료를 부과토록 조치합니다.

○ 서울시와 협의하지 않고 공사를 진행도중 교통, 보행 민원이 발생한 경우 공사시행자(시공사, 감리사, 현장소장, 감리단장)에게는 패널티를 부여, 업무담당자는 문책토록 각 기관별 감사담당실로 통보 조치합니다.

끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	백바름		교통운영팀장	최진경		교통운영과장	05/17 강진동
협조자
시행	교통운영과-8335	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2466	/전송		/	pblqw6293@seoul.go.kr	/	대시민공개