【기본에 강하고, 사랑과 행복이 넘치는 양천】
	양천소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	소방청사 보수·보강공사 세부 일정 알림

1. 소방행정과-5522(2018.05.11.)호 『소방청사 보수, 보강공사 계약체결 알림』과 관련입니다.

2. 우리서 청사 보수·보강공사 게약 체결에 따라 세부 일정을 안내하오니 각 과, 현장대응단, 신정119안전센터에서는 공사 진행에  협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 양천소방서 청사 보수·보강공사

나. 공사일정 : 2018. 5. 14.(월) ~　6. 12.(화)

	일 자	세 부 사 항
1주차	05.14. ~ 05.20.	○ 1층 경량 칸막이 공사(남자 구급대기실) ○ 2층 중앙홀 우드시트 판넬, 인테리어 필름지 취부
2주차	05.21. ~ 05.27.	○ 1층 등 라인 조정, 도어설치, 도장, 도배 등 마무리 작업 ○ 2층 중앙홀 도장 ○ 2층 사무실 칸막이 철거 및 유리 칸막이, 창호 설치 ○ 훈련탑 기초공사
3주차	05.28. ~ 06.03.	○ 2층 사무실 바닥, 천장 보수 및 도장공사 ○ 훈련탑 철골 작업
4주차	06.04. ~ 06.10.	○ 2층 사무실 바닥왁싱 및 수납장 설치 ○ 2층 대기실 도배 ○ 훈련탑 도장 및 훈련구조물 설치 ○ 신정119안전센터 창고 지붕 교체 및 장비 다이 설치
5주차	06.11. ~ 06.12.	○ 공사마무리(청소 등)

※ 상기 일정은 공사 중 상황에 따라 변경 가능

3. 행정사항

○ 2층 복도에 설치된 경량칸막이 구조물 철거 및 사무실 왁싱공사시 사무실 등 출입이 불가(제한)하오니 참고하시기 바랍니다

- 5. 25.(금) 18:00 ~ 5. 27.(일) 18:00  /복도 등 칸막이 철거 공사

- 6. 02.(토) 09:00 ~ 6. 03.(일) 18:00 /사무실 천정 도장 및 바닥 왁싱공사

붙임 : 1. 공사 공정표 1부.

2. 공사 도면 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장,신정119안전센터장,신월119안전센터장,목동119안전센터장,신트리119안전센터장
담당자	이성진		장비회계팀장	김철수		소방행정과장	05/17 代이상규
협조자
시행	소방행정과-5768	(		)	접수		(		)
우	07992	서울특별시 양천구 목동서로 180 (목동919-6) 양천소방서	/	http://fire.seoul.kr/yangchun
전화	02-2651-7386	/전송	02-2652-5085	/	aa1819@seoul.go.kr	/	부분공개(6)