상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	구의정수센터 재건설공사 하자보수를 위한 제2정수장 취수중단 관련 업무 협조 요청

1. 구의 정수시설과-537(’18.03.05.)호 및 생산관리과-2339(’18.03.06)호와 관련입니다.

2. 구의정수센터 재건설공사 하자보수를 위한 제2정수장 취수중단 관련 관계자회의 결과 관련부서 및 정수센터에 아래와 같이 업무협조 요청하오니 깨끗한 아리수를 안정적으로 생산할 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 업무협조 요청사항

○ 하자내용 : 침전지-여과지간 합벽부 균열 누수

○ 보수일정

①단계 : 여과지 유입수로 계열분리 수문설치(3.12~3.22) ⇒ 2정수장 전체 생산중단

②단계 : 수문디스크 제작( 3.23~4.12) ⇒ 2정수장 정상 가동

③단계 : 균열 부분 하자보수(4.13~5월말) ⇒ 2정수장 25만톤/일 중 12.5만톤/일(50%) 가동

○ 부서별 협조 내용

관련 부서	협조 내용
시설과	구의 하자보수 공정관리 철저
배수과 강북정수센터	월계배수지 송수관 이설관련 강북(공릉) ⇒ 구의(월계) 대체급수 환원시기를 보수일정 ①단계 완료 후 시행
암사정수센터	보수일정 ①③단계 중 구의정수센터 생산량 감소 기간 동안 암사 ⇒ 구의(아차산) 공급량 증산 보충
구의정수센터	보수일정 ①③단계 중 생산가능한 시설용량 한도에서 최대한 생산토록 정수시설 최적 유지 및 하자보수 공정관리 철저

※ 관련 정수센터에서는 구의 하자보수기간 동안 단수가 수반되는 공사는 가급적 자제

붙임 : 1. 구의정수센터 관련 공문 및 첨부서류 각1부.

2. 월계배수지 송수관 이설 관련 급수운영 계획(배수과) 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	배수과장,시설과장,구의아리수정수센터소장,암사아리수정수센터소장,강북아리수정수센터소장
주무관	권창범		생산관리과장	한희선		생산부장	03/09 代한희선
협조자
시행	생산관리과-2498	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시상수도사업본부 생산부 생산관리과	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	31461318	/전송	02-3146-1319	/	kcb0810@seoul.go.kr	/	대시민공개